109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 구에서 ‘18년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후
내당1동 행정복지센터 신축	3,518	-	-	3,518	-	2020	2018	10

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2018년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

내당1동 행정복지센터 신축

담당자

총무과 최호권(☎663-2224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동청사가 노후‧협소하여 이용이 불편한 청사를 신축하여 주민에게 다양한       행정서비스와 문화여가, 공유공간을 제공함으로써 행복한 지역공동체        기반을 조성하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 9. ~ 2020. 10.

○ 위 치 : 대구광역시 서구 서대구로4길 35(내당동)

○ 규 모 : 지하1층 / 지상3층, 연면적 990㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,518백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,518	-	-	3,518
국 비
시 도 비
시군구비	3,518	-	-	3,518
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 내당1동 행정복지센터 신축계획 수립 : ‘18.9.21.

○ 내당1동 행정복지센터 신축 공유재산 관리계획 : ‘18.10.10

○ 공유재산심의 및 심의의결

□ 향후계획

○ ‘19.  1~4월 : 설계공모

○ ‘19.  5~8월 : 내당1동 행정복지센터 건립공사 기본 및 실시설계용역 시행

○ ‘19.  8월 : 설계용역 완료

○ ‘19.  9월 : 일상감사 및 계약심사

○ ‘19. 10월 : 공사입찰․계약 선정

○ ‘19. 10월 : 공사 착공

○ ‘20. 10월 : 청사 준공

10-2. 지방채 발행사업

우리 구에서 ‘18년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 구에서 ‘18년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.