109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 구에서 ‘19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후
내당1동 행정복지센터 건립	3,518	-	160	1,000	2,358	2021	2018	25
평리5동 공공복합청사 건립	16,139	-	-	-	16,139	2024	2019	-
평리6동 행정복지센터 건립	3,843	-	-	-	3,843	2022	2019	-

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2019년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

- 사업별로 별지 작성

사업명

내당1동 행정복지센터 신축

담당자

총무과 박세령(☎663-2224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동청사가 노후‧협소하여 이용이 불편한 청사를 신축하여 주민에게 다양한       행정서비스와 문화여가, 공유공간을 제공함으로써 행복한 지역공동체        기반을 조성하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 9. ~ 2021. 3.

○ 위 치 : 대구광역시 서구 서대구로4길 35(내당동)

○ 규 모 : 지하1층 / 지상3층, 연면적 954.52㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,518백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2020년 이후
계	3,518	-	160	1,000	2,358
국 비
시 도 비
시군구비	3,518	-	160	1,000	2,358
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 내당1동 행정복지센터 신축계획 수립 : ‘18. 9.

○ 내당1동 행정복지센터 신축 공유재산 관리계획 : ‘18. 10.

○ 공유재산심의 및 심의의결 : ‘19. 12.

○ 설계공모 : ‘19. 1.

○ 기본 및 실시설계용역 시행 : ‘19. 5.

○ 일상감사 및 계약심사 : ‘19. 11.

○ 공사입찰ㆍ계약 선정 : ‘19. 12.

○ 공사 착공 : ‘20. 1.

□ 향후계획

○ 청사 준공 : ‘21. 3.

사업명

평리5동 공공복합청사 신축

담당자

총무과 박세령(☎663-2224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서구 평리지구 주택재정비촉진사업 구역 내에 포함되어 있는 평리5동 청사를 재정비구역공간배치계획에 의거 이전하고 평리5동 공공복합청사로 확대 신축하여 주민에게 다양한 행정서비스를 제공하고 문화여가 및 공유공간을 제공함으로써 행복공동체 기반을 조성하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 10월 ~ 2024. 3월

○ 위 치 : 대구광역시 서구 평리동1485-5 일원

○ 규 모 : 지하 1층∼지상5층 연면적 3,960㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  16,139백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	16,139				16,139
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황

○ 지방재정 투·융자 심사 완료

○ 공유재산관리계획 심의 및 구의회 승인

□ 향후계획

○ 공공건축 사업계획서에 대한 사전검토 : 2020. 10.

○ 건축설계공모 및 실시설계 : 2021. 6.

○ 공사시행 : 2022. 1.

사업명

평리6동 행정복지센터 신축

담당자

총무과 박세령(☎663-2224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서구 평리지구 주택재정비촉진사업 구역 내에 포함되어 있는 평리6동 청사를 재정비구역공간배치계획에 의거하여 이전 신축함으로써 주민에게 다양한 행정 서비스와 문화여가, 공유공간을 제공함으로써 행복공동체 기반을 조성하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 10월 ~ 2022. 12월

○ 위 치 : 대구광역시 서구 평리동628-1 일원

○ 규 모 : 지상3층 연면적 990.63㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,843백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	3,843				3,843
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황

○ 지방재정 투·융자 심사 완료

○ 공유재산관리계획 심의 및 구의회 승인

□ 향후계획

○ 건축설계공모 및 실시설계 : 2021. 1.

○ 공사시행 : 2021. 11.

10-2. 지방채 발행사업

우리 구에서 ‘19년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 구에서 ‘19년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.