민선8기 구청장 공약사업 관리카드

				관리번호	1-2
공약제목	하·폐수처리장 통합지하화 기반 조성
주관부서	기획예산실 역세권‧정책개발팀 담당자 김수경 ☎663-2293			협조기관 (관련부서)		市 서대구역세권개발과 ※ 시 주관사업
사업구분	지속사업	완료시기	임기 후	사업주체		대구시
사업기간	2018 ~ 2030	소요예산	600,000백만원 (민간투자)

▢ 공약내용

❍ 서대구역 인근 4개의 노후 하·폐수처리시설을 통합 지하화하여 환경개선 및 역세권개발사업과의 시너지 효과 창출

▢ 사업개요

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2030년

❍ 사업위치 : 대구광역시 북부하수처리장

❍ 사 업 비 : 600,000백만원 (민간투자)

❍ 사업내용 : 4개의 하·폐수 처리장을 북부하수처리장 지하에 통합

건설하고, 지상에 지하 공기 배출시설을 겸비한 100m 이상 초고층 전망대, 물놀이장·캠핑장 등 관광 레저시설을 설치

▢ 사업목표 및 연도별 추진계획

최종목표	연도(년)	연도별 추진계획 및 목표
하·폐수처리장 통합지하화	’23~’25	기본설계 및 실시협약 검토
		실시협약체결 및 사업시행자 지정
	’26	실시설계 및 실시계획 승인
	’26~’30	공사 착공 및 추진

▢ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분		계	임기 전 (기투자)	투 자 계 획
				임 기 내					임기 후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계		600,000							600,000
	국비
	시비
	구비
기타		600,000							600,000

*기타:민자

▢ 추진실적

❍ 민간투자사업 제안서 접수 및 PIMAC* 민자적격성조사 의뢰	: '18.  12월

* PIMAC : KDI(한국개발연구원) 공공투자관리센터

❍ PIMAC 민자적격성조사 완료	: '20.   3월

❍ 전략환경영향평가(초안) 주민설명회(비산7동주민센터)  : ‘20.  5월

❍ 하수도정비기본계획 부분변경 승인 (환경부→市)	: '20.  9월

❍ 민간투자사업 위·수탁 업무협약체결 (한국환경공단)	: '21.  5월

❍ 제3자 제안공고(안) 작성 및 PIMAC검증 의뢰	: '21.  5월

❍ 지방민간투자사업 심의 및 시의회 동의 (원안가결)	: '21.  9월

❍ 중앙민간투자사업 심의 (기재부, 원안가결)	: '21. 12월

❍ 제3자 제안공고	: '22.  1월

❍ 협상대상자 최종 선정 (GS 컨소시엄)	: '22. 9. 7.

❍ 착수회의 개최 (GS 컨소시엄, 환경공단, 대구시)	: '22.  9. 26.

❍ 기본설계 경제성검토 실시	: ’22.  10월~現

▢ 추진상황

진도율	이행 완료		추진 중		미착수	비고
	종결	이행후 계속추진	정상	부진
40%			○

▢ 문제점 및 대책

❍ 대구시에서 「대구 염색산업단지 이전 기본계획 수립 및 타당성 검토 연구용역」을 추진 중으로 하·폐수처리장 통합 지하화 사업 지연이 우려됨.

➠ 대구시와 긴밀한 협조체제 구축으로 사업추진이 원활하게 될 수 있도록 적극 협조

▢ 향후계획

❍ 실시협약, 사업시행자 지정	: ’25.

❍ 실시설계 및 실시계획 승인	: ’26.

❍ 공사 착공 및 추진	: ’26. ~ ’30.

▢ 사진자료

서대구 하폐수처리장 통합지하화 위치도	서대구 하폐수처리장 통합지하화 조감도