민선8기 구청장 공약사업 관리카드

				관리번호	1-3
공약제목	서대구역 광장 조성
주관부서	기획예산실 역세권‧정책개발팀 담당자 김수경 ☎663-2293			협조기관 (관련부서)		市 서대구역세권개발과 ※ 시 주관사업
사업구분	지속사업	완료시기	임기 후	사업주체		대구시
사업기간	2019 ~ 2026	소요예산	109,700백만원 (국 13,200, 시 96,500)

▢ 공약내용

❍ 서대구역 활성화와 역세권 주변 개발사업의 원활한 추진을 위한 마중물 역할을 하도록 광장 조성

▢ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2026년

❍ 사업위치 : 대구광역시 서구 이현동 269-2 일원(서대구역 네거리)

❍ 사 업 비 : 109,700백만원(국비 13,200, 시비 96,500)

❍ 사업내용 : 서대구역 이용객 교통편의 제공과 낙후된 서대구

역세권 주변개발 활성화 도모를 위한 교통광장 조성

▢ 사업목표 및 연도별 추진계획

최종목표	연도(년)	연도별 추진계획 및 목표
서대구역 광장 조성	2022	서대구역 광장 조성사업 공사 입찰
	2023	공사 착공
	2024	공사 추진
	2025	공사 추진
	2026	공사 추진

▢ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분		계	임기 전 (기투자)	투 자 계 획
				임 기 내					임기 후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계		109,700	64,000	8,000	1,000	9,600	19,300
	국비	13,200	5,200	8,000
	시비	96,500	58,800		1,000	9,600	19,300	3,900	3,900
	구비
민자

▢ 추진실적

❍ 서대구역 광장(12호) 조성계획 수립	: ’19. 4월

❍ 기본 및 실시설계용역 시행(시 건설본부)	: ’19. 12월

❍ 타당성조사(LIMAC) 및 중앙투자심사(행안부)	: ’20. 1 ~ 4월

❍ 실시계획 고시	: ’20. 6월

❍ 보상계획 공고 및 감정평가 실시	: ’21. 3 ~ 9월

❍ 보상 협의 및 수용재결 신청	: ’21. ~ ’22.

❍ 시공사 선정	: ’22. 12월

❍ 1광장 및 임시주차장(3, 4광장) 착공         : ’23. 1월

▢ 추진상황

진도율	이행 완료		추진 중		미착수	비고
	종결	이행 후 계속 추진	정상	부진
60%			○

▢ 문제점 및 대책

❍ 서대구역 광장 조성 사업이 세입자들의 미이주로 공사가 다소 지연되고 있음

➠ 서대구역 광장 조성사업이 원활히 진행될 수 있도록 대구시와 긴밀한 협조체제 구축

▢ 향후계획

❍ 1광장 및 3, 4광장 임시주차장 준공	: ’24.

❍ 2광장 조성	: ’26.

▢ 사진자료

서대구역 광장 위치도	서대구역 광장 조성계획