민선8기 구청장 공약사업 관리카드

				관리번호	13-2
공약제목	소규모 녹지공간 조성
주관부서	도시공원과 녹지팀, 공원관리팀 담당자 김지은, 김은지 ☎663-2853, 2823			협조기관 (관련부서)
사업구분	신규사업	완료시기	임기 내	사업주체		서구
사업기간	2022~2024	소요예산	3,080백만원 (시610, 구2,470)

▢ 공약내용

❍ 녹색 휴양공간 확대로 정주여건 개선 및 완충녹지 노후시설 재정비로 쾌적한 환경 조성

▢ 사업개요

❍ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년

❍ 사업위치 : 관내 녹지대 및 쌈지공원 일원

❍ 사 업 비 : 3,080백만원 (시비 610, 구비 2,470)

❍ 사업내용 :

- 그린웨이 정비

- 철도변완충녹지 정비

- 쌈지 공원 조성 등

▢ 사업목표 및 연도별 추진계획

최종목표	연도(년)	연도별 추진계획 및 목표
녹지공간 조성 및 정비	2022	·그린웨이 문화원숲 조성 완료 ·철로변 북편(원대동) 완충녹지 정비 완료 ·철로변 북편(상중이동) 정비 완료 ·비산6동 소규모 공원 조성 완료 ·비산2.3동 쌈지공원 조성 완료
	2023	·그린웨이 정비 사업 완료 ·철로변(남편) 완충녹지 정비 완료 ·생활환경숲 조성 사업 완료 ·자녀안심그린숲 조성 사업 완료
	2024	·그린웨이 정비 사업 완료

▢ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분		계	임기 전 (기투자)	투 자 계 획
				임 기 내					임기 후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계		3,080		1,830	950	300
	국비
	시비	610			610
	구비	2,470		1,830	340	300
민자

▢ 추진실적

❍ 그린웨이 정비

‘23. 3 ~ 5월 : 그린웨이 3-1BL 화장실 설치공사 시행

‘23. 11 ~ 12월 : 서대구공단 완충녹지 그린웨이 정비공사 시행

❍ 철도변 완충녹지 정비

‘23. 4 ~ 5월 : 철도변 남편 완충녹지 정비공사 시행

❍ 생활환경숲 조성

‘23. 3 ~ 4월 : 철도변 북편 완충녹지 초화류 식재공사 시행

‘23. 5 ~ 6월 : 도심지 생활환경숲 조성사업 시행

❍ 자녀안심 그린숲 조성

‘23. 5 ~ 6월 : 대성초 자녀안심 그린숲 조성사업 시행

▢ 추진상황

진도율	이행 완료		추진 중		미착수	비고
	종결	이행 후 계속 추진	정상	부진
85%			○

▢ 문제점 및 대책

❍ 지속적인 관리를 위한 녹지분야 예산확보 필요
➠ 시비 지원 적극 요청

▢ 향후계획

❍ ‘24. 1 ~ 6월 : 그린웨이 8-1BL 테마정원 조성사업 추진

▢ 사진자료

그린웨이 3-1BL 화장실 설치	철도변 남편 완충녹지 정비
도심지 생활환경숲 조성	대성초 자녀안심 그린숲 조성
철도변 북편 완충녹지 초화류 식재	서대구공단 완충녹지 그린웨이 정비공사