민선8기 구청장 공약사업 관리카드

				관리번호	14
공약제목	부모와 아이가 행복한 키즈앤맘센터 건립
주관부서	복지정책과 여성아동팀 담당자 이홍기 ☎663-2546			협조기관 (관련부서)		문화홍보과 건축주택과
사업구분	지속사업	완료시기	임기 내	사업주체		서구
사업기간	2022 ~ 2026	소요예산	43,000백만원

▢ 공약내용

❍ 영유아·아동의 놀이공간, 가족 간 돌봄, 취미 교실 등 모든 가족이

문화와 여가를 즐길 수  있는 다목적 복합문화공간 마련

▢ 사업개요

❍ 사업기간: 2022. ~ 2026.

❍ 사업위치: 중리동 1073번지 일원

❍ 사 업 비: 43,000백만원 (부지 매입비 13,000, 공사비 30,000)

❍ 규    모: 지하1층, 지상4층 / 연면적 6,715㎡, 부지면적 3,941㎡

❍ 주요시설

- 영·유아 실내 놀이터, 장난감도서관, 스마트 체험관 등

- 맘사랑방, 주민 사랑방, 카페 등

- 수영장, 다목적홀, 체력단련실, GX룸 등

▢ 사업목표 및 연도별 추진계획

최종목표	연도(년)	연도별 추진계획 및 목표
키즈앤맘센터 건립	2022	우수시설 벤치마킹, 공간구성
	2023	부지매입 및 등기, 설계용역 시행
	2024	입찰공고 및 계약, 착공
	2026	준공 및 개소

▢ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분		계	임기전 (기투자)	투 자 계 획
				임 기 내					임기후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계		43,000			15,100	27,900
	국비
	시비
	구비	43,000			15,100	27,900
민자

▢ 추진실적

❍ 우수시설 견학 : ‘22. 8 ~ ‘23. 12월

- 육아종합지원센터 7개소(강남구, 강북구, 해운대구, 부산 북구, 성남시, 경북, 구미시)

- 일원어린이 실내놀이터(서울시 강남구), 달서아이꿈센터(달서구)

- 세대공감 창의놀이터(울산 북구), 큰나무놀이터(울산 울주군)

- 양평어린이건강놀이터(양평군)

❍ 건립 기본계획 수립 : ‘23. 3월

❍ 기본설계 완료 : ‘23. 12월

▢ 추진상황

진도율	이행 완료		추진 중		미착수	비고
	종결	이행 후 계속 추진	정상	부진
20%			○

▢ 향후계획

❍ 설계용역 시행                : ‘23. 10월 ~ ‘24. 8월

❍ 일상감사 및 계약심사         : ‘24. 9월

❍ 공사입찰 및 계약             : ‘24. 9월

❍ 착공 및 준공                 : ‘24. 10월 ~ ‘26. 3월

▢ 사진자료

서울 강북구 육아종합센터 실내놀이터	부산 북구 육아종합센터 실내놀이터
성남시 육아종합지원센터	경북 육아종합지원센터
구미시 육아종합지원센터	달서구 달서아이꿈센터 실내놀이터
울산 북구 세대공감 창의놀이터	울산 울주군 큰나무 놀이터
양평군 건강어린이 놀이터	헬스&키즈드림센터 조감도