민선8기 구청장 공약사업 관리카드

				관리번호	19
공약제목	제5노인복지관 건립
주관부서	사회복지과 노인복지팀 담당자 이미연 ☎663-2535			협조기관 (관련부서)		건축주택과
사업구분	신규사업	완료시기	임기 내	사업주체		서구
사업기간	2022 ~ 2025	소요예산	12,200백만원

▢ 공약내용

❍ 노인복지증진을 위한 접근성, 편의성을 갖춘 노인복지관 확충으로 지역적 한계를 보완하여 노후 여가 서비스를 지원하고자 함

▢ 사업개요

❍ 사업기간 : 2022. ∼ 2025.

❍ 사업위치 : 대구광역시 서구 비산동 317-3

❍ 사 업 비 : 12,200백만원 (구비)

❍ 사업내용

- 규모 : 지상5층, 연면적 1,800㎡정도

- 시설 : 주차장, 건강증진실, 프로그램실, 강당, 식당 등

▢ 사업목표 및 연도별 추진계획

최종목표	연도(년)	연도별 추진계획 및 목표
제5노인복지관 건립	2022	계획수립 및 부지확보
	2023	공공건축 사전검토, 심의 및 설계 시행
	2024	계약심사, 업체 선정 및 공사착수
	2025	공사 시행 및 준공

▢ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분		계	임기 전 (기투자)	투 자 계 획
				임 기 내					임기 후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026
계		12,200		4,100	2,500	5,090	510
	국비
	시비
	구비	12,200		4,100	2,500	5,090	510
민자

▢ 추진실적

❍ 계획수립 및 건립부지 확보    : ‘22. 8 ~ 12월

❍ 공공건축 사업계획서 사전검토 : ‘23. 1 ~ 3월

❍ 공공건축 심의                : ‘23. 4월

❍ 설계공모                     : ‘23. 5 ~ 7월

▢ 추진상황

진도율	이행 완료		추진 중		미착수	비고
	종결	이행 후 계속 추진	정상	부진
15%			◯

▢ 향후계획

❍ 설계용역 시행                    : ‘23. 7월 ~ ‘24. 3월

❍ 일상감사(계약심사), 입찰 및 계약  : ‘24. 4 ~ 5월

❍ 공사시행	: ‘24. 6월 ~ ‘25. 9월

▢ 사진자료

제5노인복지관 건립 부지