민선8기 구청장 공약사업 관리카드

				관리번호	2
공약제목	서대구로 도시철도 순환선 구축 기반 마련
주관부서	기획예산실 역세권‧정책개발팀 담당자 김수경 ☎663-2293			협조기관 (관련부서)		市 철도시설과 ※ 시 주관사업
사업구분	지속사업	완료시기	임기 후	사업주체		대구시
사업기간	2018 ~ 2032	소요예산	168,900백만원 (국 101,300, 시 67,600)

▢ 공약내용

❍ 도시철도망 구축으로 대중교통 활성화 및 교통 사각지대 해소

▢ 사업개요

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2032년

❍ 사업구간 : 서대구역 ~ 안지랑역(9개 정거장)

❍ 사 업 비 : 168,900백만원 (국비 101,300, 시비 67,600)

❍ 사업내용 : 순환선-서대구역 연결로 편리하고 안전한 도시철도 서비스 제공

▢ 사업목표 및 연도별 추진계획

최종목표	연도(년)	연도별 추진계획 및 목표
서대구로 도시철도 순환선 구축 기반 마련	’23~’25	도시철도망 구축계획 수립 용역 및 국토부 협의
	’25	도시철도망 구축계획(’26~’35) 승인 및 고시(국토부)
	’26	예비타당성 조사
	’27~’32	기본계획, 실시설계, 공사 추진

▢ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분		계	임기 전 (기투자)	투 자 계 획
				임 기 내					임기 후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계		168,900							168,900
	국비	101,300							101,300
	시비	67,600							67,600
	구비
민자

▢ 추진실적

❍ 대구시 도시철도망 구축계획 승인·고시(국토부)	: ’18. 7월

❍ 신교통시스템 사전타당성 조사 용역	: ’18. 7월

❍ 도시철도망 구축계획 수립 사전협의(국토부)	: ’21. 5월

❍ 신교통시스템 도입 사전타당성 조사용역 결과(B/C 1.03)

‘서대구로’ 노선 우선도입 노선으로 선정	: ’21. 6월

❍ 도시철도망 구축계획 변경 승인 신청(국토부)	: ’21. 8월

❍ 전문 연구기관 검토, 관계부처 협의	:  ’21. 12월

❍ 도시교통정책실무위원회	: ’22. 6월~

❍‘도시철도망 구축계획 변경안 고시’취소 승인(국토부)	: ’22. 8월

❍ 도시철도망 구축계획(‘26 ~ ‘35) 수립 용역 착수	: ’23. 6월

▢ 추진상황

진도율	이행 완료		추진 중		미착수	비고
	종결	이행후 계속추진	정상	부진
30%			○

▢ 문제점 및 대책

❍ 대구시에서 변화된 도시구조를 고려하여 도시 주요 거점을 통과하는 ‘더 큰 대구 순환선’을 위한 도시철도망 구축계획(‘26 ~ ‘35) 수립 용역을 시행 중으로, 기존 노선 변경에 대한 주민 우려가 예상됨

➠ 순환선의 노선은 도시철도 서비스 사각지대에 있었던 지역 주민들의 오랜 숙원사업이므로 기존 노선이 유지될 수 있도록 대구시와 긴밀한 협조체제 구축

▢ 향후계획

❍ 도시철도망 구축계획 수립 및 국토부 협의	: ’23. ~ ’25.

❍ 도시철도망 구축계획(’26 ~ ’35) 승인·고시(국토부)	: ’25. 下

❍ 우선순위별 예타, 기본계획, 실시설계, 공사추진	: ’26. ~ ’32.