민선8기 구청장 공약사업 관리카드

				관리번호		3
공약제목	서대구산업단지 재생사업 추진
주관부서	경제과 상공진흥팀 담당자 김부현 ☎663-2655			협조기관 (관련부서)	市 산단진흥과 / 경제과 ※ 시 주관사업
사업구분	지속사업	완료시기	임기 내	사업주체	대구시
사업기간	2009 ~ 2027	소요예산	115,802백만원 (국 57,901, 시 57,901)

▢ 공약내용

❍ 서대구산업단지 재생사업 추진, 미래발전 기틀 마련

❍ 안전융합 산업기술 지원센터

❍ 패션비즈클러스터 시범지구 개발

▢ 사업개요

❍ 사업기간 : 2009년 ~ 2027년

❍ 사업위치 : 중리동, 이현동 일원

❍ 사 업 비 : 115,802백만원 (국 57,901, 시 57,901)

❍ 사업내용

- 도로확장‧개설, 주차장 신설, 특화거리조성 등 기반시설 확충

- 토지이용계획변경 및 도심환경에 적합한 업종 배치

▢ 사업목표 및 연도별 추진계획

최종목표	연도(년)	연도별 추진계획 및 목표
◦ 국·시비 투자를 통한 산업단지 기반시설 확충 ◦ 도시형 첨단업종 입지환경 조성 및 청년 일자리 창출	2022	· 기반시설 2단계 보상착수 와룡로72길(1차), 와룡로73길(2차) (`22. 3.)
	2023	· 기반시설 2단계 보상착수 와룡로72길(2차) (`23. 1.) · 기반시설 2단계 공사착공 와룡로66길(`23. 1.) · 활성화구역 진입도로 공사(2구간) 추진(`23. 1.) · 기반시설 2단계 공사착공 와룡로73길(`23. 10.)
	2024	· 기반시설 2단계 공사착공 와룡로72길(`24. 1.)
	2027	· 기반시설 2단계 공사 준공(`27. 12.)

▢ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	임기 전 (기투자)	투 자 계 획
			임 기 내			임기 후
			2022년	2023년	2024년
계	115,802	88,080	12,900	6,870	5,418	2,534
국비	57,901	45,465	7,000	2,718	2,718	-
시비	57,901	42,615	5,900	4,152	2,700	2,534
구비
민자

=> 임기전 사업비는 2022.7월 이전 집행 완료한 사업비

▢ 추진실적

❍ ‘09. 9월 : 노후공단 재정비 우선사업지구 선정(국토해양부)

❍ ‘13. 12. 30. : 재생사업지구 지정 고시(대구시)

❍ ‘14. 3월 : 재생사업 시행계획용역 착수(‘14. 3. ~ ‘15. 9.)

❍ ‘14. 11월 : 재생사업지구 서측 진입도로 건설공사세목고시(대구시)

❍ ’15. 7월 : 정부 주도「노후산단 경쟁력강화사업 대상지」에 선정

❍ ‘15. 9월 : 재생사업 시행계획(안) 주민공람

❍ ‘15. 10. 30. : 재생사업 시행계획 승인 고시(대구시)

❍ ’15. 12월 : 서측 도로 보상착수 및 공사발주

❍ ’16. 3월 : 서대구산업단지 관리기본계획 고시

❍ ’16. 6월 : 노후산단 재생사업 추진 기본협약 체결(LH)

❍ ’16. 9월 : 기반 시설 1단계 공사 착공

❍ ’16. 12월 : 활성화구역 지정 고시(대구시)

❍ ’18. 12월 : 활성화구역 조성 및 복합지식산업센터 착공

❍ ’20. 5월 : 재생사업지구 지정(9차) 및 재생시행계획(4차) 변경

❍ ’20. 5월 : 기반 시설 1단계(서대구산단 서편 도로) 도로 준공

❍ ’20. 9월 : 기반 시설(1단계) 공사 준공

❍ ’21. 4월 : 기반 시설(2단계) - 와룡로73길, 66길 보상 착수

❍ ’21. 6월 : 복합지식산업센터 준공

❍ `22. 1월 : 기반 시설(2단계)-와룡로72길 보상착수

❍ `23. 1월 : 기반 시설(2단계)-와룡로72길(2차) 보상착수

❍ `23. 1월 : 기반 시설(2단계)-와룡로66길, 90길(2구간) 공사 착공

❍ `23. 6월 : 사업 기간 변경 협의 완료 (2027년까지)

▢ 추진상황

진도율	이행 완료		추진 중		미착수	비고
	종결	이행 후 계속 추진	정상	부진
87%			○

▢ 문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

▢ 향후계획

❍ 기반 시설(2단계) - 와룡로73길, 72길 공사 착공 : 2024. 1.

❍ 기반 시설(2단계) - 공사 준공	: 2027. 12.

▢ 사진자료

기반시설 계획도