민선8기 구청장 공약사업 관리카드

				관리번호		4
공약제목	염색산업단지 재생사업
주관부서	경제과 (상공진흥팀) 담당자 김부현 ☎663-2655			협조기관 (관련부서)	市 산단진흥과 / 경제과 ※ 시 주관사업
사업구분	지속사업	완료시기	임기 내	사업주체	대구시
사업기간	2016 ~ 2022	소요예산	208억원 정도 (국 100억원, 시 108억원)

▢ 공약내용

❍ 국·시비 투자로 노후한 염색단지 기반시설 확충

❍ 산단내 정주여건 개선을 통한 산업단지 경쟁력 강화

▢ 사업개요

❍ 사업기간 : 2016년 ~ 2022년

❍ 사업위치 : 비산·이현·평리동 일원

❍ 사 업 비 : 208억원 정도 (국 100억원, 시 108억원)

❍ 사업내용

- 염색산단의 기반시설 정비·편의시설 확대

- 노외주차장 신설, 도로 정비, 교량 확장

▢ 사업목표 및 연도별 추진계획

최종목표	연도(년)	연도별 추진계획 및 목표
· 염색단지 기반 시설 확충 · 산단내 정주여건 개선을 통한 경쟁력 강화	2022	· 기반 시설 1차 정비공사 준공(`22. 11.) · 기반 시설 2차, 총괄 정비공사 준공(`23. 1.)

▢ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	임기 전 (기투자)	투 자 계 획
			임 기 내	임기 후
			2022년
계	20,808	18,150	2,658	-
국비	10,000	10,000	-	-
시비	10,808	8,150	2,658	-
구비
민자

=> 임기전 사업비는 2022.7월 이전 집행완료한 사업비

▢ 추진실적

❍ ‘09. 9월 : 노후공단 재정비 우선사업지구 선정(국토해양부)

❍ ‘13. 12. 30. : 재생사업지구 지정 고시(대구시)

❍ ‘14. 3월 : 재생사업 시행계획용역 착수(‘14. 3. ~ ‘15. 9.)

❍ ‘14. 11월 : 재생사업지구 서측 진입도로 건설공사세목고시(대구시)

❍ ’15. 7월 : 정부 주도「노후산단 경쟁력강화사업 대상지」에 선정

❍ ‘15. 9월 : 재생사업 시행계획(안) 주민공람

❍ ‘15. 10. 30. : 재생사업 시행계획 승인 고시(대구시)

❍ ’15. 12월 : 서측 도로 보상착수 및 공사발주

❍ ’16. 3월 : 서대구산업단지 관리기본계획 고시

❍ ’16. 6월 : 노후산단 재생사업 추진 기본협약 체결(LH)

❍ ’16. 9월 : 기반 시설 1단계 공사 착공

❍ ’16. 12월 : 활성화구역 지정 고시(대구시)

❍ ’18. 12월 : 활성화구역 조성 및 복합지식산업센터 착공

❍ ’20. 5월 : 재생사업지구 지정(9차) 및 재생시행계획(4차) 변경

❍ ’20. 5월 : 기반 시설 1단계(서대구산단 서편도로) 도로 준공

❍ ’20. 9월 : 기반 시설(1단계) 공사 준공

❍ ’21. 4월 : 기반 시설(2단계) - 와룡로73길, 66길 보상 착수

❍ ’21. 6월 : 복합지식산업센터 준공

❍ `22. 1월 : 기반 시설(2단계)-와룡로72길 보상 착수

❍ `22. 8월 : 기반 시설(2단계)-와룡로66길 공사 착공

❍ `22. 11월 : 기반 시설 공사(1차) 준공

❍ `23. 1월 : 기반 시설 공사(2차, 총괄) 준공

▢ 추진상황

진도율	이행 완료		추진 중		미착수	비고
	종결	이행 후 계속 추진	정상	부진
100%	○

▢ 문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

▢ 사진자료

노외1주차장

노외2주차장

노외3주차장

비산교 확장

도로정비

B=8~20m

L=5.7km

공공공지

기반시설 계획도

조감도