민선8기 구청장 공약사업 관리카드

				관리번호	5
공약제목	저소득 위기가구 주거환경 개선
주관부서	생활보장과 주거복지팀 담당자 유주영 ☎663-2991			협조기관 (관련부서)		동 행정복지센터
사업구분	신규사업	완료시기	임기 내	사업주체		서구
사업기간	2022 ~ 2026	소요예산	7,000백만원

▢ 공약내용

❍ 주거최저기준 미달 가구 집수리사업 추진 1,500가구

▢ 사업개요

❍ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

❍ 사업위치 : 서구 전체

❍ 사 업 비 : 7,000백만원 (구 100%)

❍ 사업내용

- 주거환경 개선(주거안전, 주거여건, 주거편의)

- 에너지재단 공동사업(에너지 효율 개선 및 주거환경 개선)

▢ 사업목표 및 연도별 추진계획

최종목표	연도(년)	연도별 추진계획 및 목표
1,500가구	2022	주거환경개선 250가구
	2023	주거환경개선 360가구
	2024	주거환경개선 360가구
	2025	주거환경개선 360가구
	2026	주거환경개선 170가구

▢ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분		계	임기 전 (기투자)	투 자 계 획
				임 기 내					임기 후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계		7,000		1,000	1,700	1,700	1,700	900
	국비
	시비
	구비	7,000		1,000	1,700	1,700	1,700	900
민자

▢ 추진실적

❍ 공사대상 : 기초수급자 및 차상위계층 중 주거위기가구

❍ 공사내용 : 도배, 장판, 싱크대, 창호 등 주거 내부 수리

❍ 준    공 : 760가구 공사 완료

- 2022년 : 350가구

- 2023년 : 410가구

▢ 추진상황

진도율	이행 완료		추진 중		미착수	비고
	종결	이행 후 계속 추진	정상	부진
50%			○

▢ 문제점 및 대책

❍ 노후주택 집수리를 위한 다양한 수혜 대상 발굴 필요

➠ 복지대상 주거실태 전수조사 실시

➠ 장애인 및 보훈단체를 통한 사업안내 및 명단 추천

❍ 사업추진 중 이사, 사망 등으로 공사 취소 가구 발생

➠ 공사 실시 전 이사계획, 실공사 여부 확인

▢ 향후계획

❍ 2024년 ~ 2025년 : 연간 360가구 지원 예정

❍ 2026년 : 170가구 지원 예정

▢ 사진자료

공사 전	공사 후
공사 전	공사 후
공사 전	공사 후