민선8기 구청장 공약사업 관리카드

				관리번호	6
공약제목	정다운 평리들마을 재생사업 추진
주관부서	도시재생과 도시재생팀 담당자 오동기 ☎663-2813			협조기관 (관련부서)
사업구분	지속사업	완료시기	임기 내	사업주체		서구
사업기간	2022 ~ 2025	소요예산	14,000백만원 (국 7,000, 시 3,500, 구 3,500)

▢ 공약내용

❍ 노후화된 평리1동 지역 내 도시재생사업을 통하여 쾌적하고 안전한 정주환경 조성

▢ 사업개요

❍ 사업기간: 2022. ~ 2025.

❍ 사업위치: 서구 평리동 772-1번지 일원

❍ 사 업 비: 14,000백만원 (국비 7,000, 시비 3,500, 구비 3,500)

※ 연계사업: 4,551백만원 (기금 700, 공기업 3,527, 기타 324)

❍ 사업내용

- 함께나눔 공동체 활성화 : 주민 커뮤니티센터 건립, 골목정원ㆍ쉼터 조성 등

- 서로상생 생활환경개선 : 창업소통공간 조성, 공영주차장 조성 등

- 평생행복 주거환경정비 : 열차촌 기억공원 조성, 노후주택 집수리 지원 등

▢ 사업목표 및 연도별 추진계획

최종목표	연도(년)	연도별 추진계획 및 목표
도시재생사업을 통한 쾌적하고 안전한 정주환경 조성	2022	도시재생사업 공영주차장 및 공원조성 부지 매입, 주차장 도시계획 결정
	2023	노후주택 집수리 1차 준공, 공영주차장 조성 추진
	2024	창의소통 공간 조성, 들마을로 가로환경 정비
	2025	사업 완료

▢ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분		계	임기 전 (기투자)	투 자 계 획
				임 기 내					임기 후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계		14,000		3,650	1,800	4,055	4,495
	국비	7,000		1,050	1,000	2,255	2,695
	시비	3,500		1,300	0	1,100	1,100
	구비	3,500		1,300	800	700	700
민자

▢ 추진실적

❍ ‘22. 3. : 평리들마을 도시재생현장지원센터 개소

❍ ‘22. 4.~8. : 평리1동 도시계획시설(공영주차장) 결정 용역

❍ ‘22. 4.~11. : 공영주차장 및 기억공원 예정 부지 부동산 매입

❍ ‘22. 10.~11. : 노후주택 집수리 지원사업 신청 접수

❍ ‘23. 1.~6. : 제1공영주차장 예정부지 매입

❍ ‘23. 3.~5. : 제2공영주차장 및 기억공원 실시설계 용역

❍ ‘23. 5.~7. : 노후주택 집수리지원사업 실시설계 용역

❍ ‘23. 12. : 도시재생 활성화계획 변경 고시

❍ ‘23. 12. : 평리들마을 공영주차장 조성사업 실시계획 인가

▢ 추진상황

진도율	이행 완료		추진 중		미착수	비고
	종결	이행 후 계속 추진	정상	부진
35%			○

▢ 향후계획

❍ ‘23. 12. ~ ‘24. 12. : 평리들마을 공영주차장 조성

❍ ‘24. 3. : 평리들마을 노후주택 집수리 지원사업(1차) 완료

❍ ‘24. 11. ~ ‘25. 9. : 평리동 주민커뮤니티센터 건립

▢ 사진자료

들마을커뮤니티 조감도	공영주차장 조감도