8		안전도시 서구 구현 기반 조성

추진부서	안전총괄과 안전기획팀 ☎663-2911	협조기관 (관련부서)	건축주택과
사업구분	임기 내 / 신규 사업	중앙정부 지원	무
정책목표	안전체험‧교육관 건립으로 안전사고 예방을 통한 안전도시 기반 조성

▢ 사업개요

❍ 사업기간 : 2023. ~ 2026.

❍ 사 업 비 : 7,000백만원(구 7,000백만원)

- 부지매입(3,000백만원), 신축공사(3,000백만원), 체험시설물(1,000백만원)

❍ 사업내용

- 규모 : 평리동 주민커뮤니티센터 지상3층, 대지면적1,290㎡(연면적965㎡)

- 시설 : 주차장, 체험관, 교육관, 강당 등

- 장소 : 안전체험관 연면적 132㎡(2층)

▢ 추진실적  (정상 추진 - 사업이행율 10%)

❍ 안전도시 서구 구현 용역 추진

❍ 안전도시 서구 구현 기반 조성으로 “안전 체험‧교육관 건립” 선정

❍ 부지 매입 완료 : ‘23. 8월

❍ 공공건축 사업계획 사전검토 : ‘23. 9 ~ 11월

❍ 사업계획 검토 및 부지확보 : ‘23. ~ ‘24.

❍ 공공건축 사전검토 및 심의 : ‘23. 9 ~ 11월

▢ 향후계획

❍ 설계공모 : ‘24. 2 ~ 4월

❍ 설계용역 : ‘24. 4 ~ 10월

❍ 공사입찰 및 계약, 착공: ‘24. 11월

❍ 공사준공 : ‘25. 9월

❍ 체험관 조성 : ‘26. 상반기 중