1. 공사명 : 퀸스로드 앞 녹지내 수경시설 설치공사

2. 위  치 : 대구광역시 서구 중리동 1136-110번지 일원

3. 면  적 : 4,000㎡

4. 목  적 : 지구온난화로 인하여 점점 열섬화 되고 있는 도시공간에 역동적이고 청량감을 주는 수경시설을 설치하여 폭염으로 지친 시민들에게 심신을 치료할 수 있는 공간과 다양한 볼거리를 제공하고 생태도시 이미지 창출과 더불어 자연과 사람이 공생하는 쾌적하고 아름다운 환경 조성에 기여하고자 함

5. 공사 개요

(1) 토            공 : 성토(0.94㎥), 절토(62.61㎥), 터파기(176.70㎥), 잔토처리(122.77㎥),

되메우기 및 다짐(84.95㎥), 잔토처리(현장외, 99.49㎥)

(2) 식     재     공 : 수목식재(관목-남천 60주),

초화류(맥문동 240주), 잔디(210.0㎡-평떼)

수목이식(구상나무 1주)

수목제거(느티나무 1주),

(3) 포장 및 경계석공 : 데크포장(1식,45.60㎡), 화강석판석포장(144.40㎡), 투수콘포장(1.90㎡), I.L.B포장(1.86㎡)

녹지경계(50.05m),재료분리경계석(27.40m)

(4) 연     못     공 : 조형분수 1식, 바닥분수 1

(5) 시  설    물  공 : 무대 1식, 앉음벽 16.25m, 통나무의자 10EA, 평의자이설 2EA, 경관석이설 1EA, 수목보호대겸벤치 1EA

(6) 급     수     공 : 집수정 4EA, PE이중벽관(D300, 43.0m), PE이중벽관(D50, 180.0m)

(7) 철     거     공 : 무근콘크리트깨기(27.09㎥)

6. 예정공정표

공 종	착수일로부터 ( 60일 )
	10		20	30		40	50		60
철 거 공 사
토 공
포 장 공 사
시설물 공사
연 못 공 사
식 재 공 사
배 수 공 사
뒷 정 리