2021년 생활안전 CCTV 설치공사

시   방   서

2021. 04.

	대구광역시 서구
	자치행정국 문화홍보과

Ⅰ. 공사 설명서

1. 공사명 : 2021년 생활안전 CCTV 설치공사

2. 공사목적

주민의 생활안전 인프라를 강화하기 위하여 CCTV를 설치하여 관내 범죄예방 활동강화 및 방범·치안인력 수요증가에 따른 한계를 극복하기 위한 시스템을 구축함으로 주민들의 생활안전 불안요소를 해소하여 안전체감도를 향상시키고 안전한 지역사회 만들기에 기여하고자 함

3. 공사장소 : 큰장로 61 외 18개소

4. 공사기한 : 착공일로부터 28일이내

5. 공사내역

가. IR스피드돔카메라(15대), 컬러LED IR카메라(14대)

나. 카메라 폴대 및 가로암, 제어함체, 산업용광스위치, 카메라 안내판

다. 광케이블 등 자가망 부대설비 및 정보통신공사 1식

라. 영상저장/분배서버, 스마트관제 L/C

구 분	착공일로부터 28일간												비고
	3	6	9	12	15	17	19	21	23	25	27	28
계약 및 착공, 실사 자재승인
폴대 및 가로암 등 제작 케이블 배선작업
현장장비 설치 및 세팅
전기, 통신망 개통
관제센터 장비설치 및 현장연동 및 준공

6. 공사일정

Ⅱ. 일반 시방서

1. 총    칙

본 시방서는 2021년 생활안전 CCTV 설치공사에 필요한 제반사항을 규정한다.

2. 적용범위

본 CCTV 설치공사를 시행함에 있어서 별도 특이한 사항을 제외하고는 설계 도서에 따라 납품·설치하여야 한다.

※ 본 설계도서에 누락 사항이 있을 경우 본 사업의 시스템 기능 수행에 필요하다고 판단되는 사항에 대해서는 각 분야별 표준시방서 기준에 따라 시행한다.

3. 적용법규 및 기술기준

가. 개인정보보호법 및 동법 시행령, 시행규칙

나. 공공기관 영상정보처리기기 설치·운영 가이드라인

다. 정보통신공사업법, 동법 시행령

라. 방송통신설비 기술기준에 관한 규정

마. 소프트웨어산업진흥법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

바. 국제표준화기구(ISO), 한국산업표준규격(KS), 국가통합인증(KC)

사. 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률, 동법 시행령, 동법 시행규칙

아. 중소기업제품 공공구매제도 운영요령

자. 기타 발주기관이 필요하다고 인정하는 법규 및 고시

차. 사업시행 중 관계 법령이 개정될 경우 개정 법령 및 권고사항 적용

4. 입찰참가자격

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하‘지방계약법’)시행령제13조(입찰의 참가자격) 및 같은 법 시행규칙 제14조(입찰 참가자격 요건의 증명)의 요건을 갖춘 업체로서 같은 법 시행령 제92조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한)에 해당되지 않는 자

나. 대구광역시에 법인등기부상 본점소재지(개인사업자인 경우에는 사업자 등록증 또는 관련 법령에 따른 허가, 인가, 면허, 등록, 신고 등 관련 서류에 기재된 사업장의 소재지를 말함)를 둔 업체

5. 조문의 해석

본 공사와 관련하여 모든 설계도서에 사용된 용어 문구의 해석에 있어 의견이 상이할 경우 발주처의 해석이 우선한다.

6. 계약자 준수사항

가. 계약자는 본 사업과 관련하여 습득한 기밀사항 및 모든 정보에 대하여 타인에게 제공 또는 누설되지 않도록 제반 보안조치를 취하여야 한다.

나. 계약자는 현장 종사자에게 안전에 관한 교육을 필히 실시하여야 하며, 본 사업 중 발생한 안전 및 재해사고에 대해 계약자 부담으로 원상복구 또는 실액변상 조치하여야 한다.

다. 계약자는 공정에 영향을 미치는 사고나 인명의 손상 또는 제삼자에게 피해를 미치는 사고가 발생하거나, 혹은 사고발생의 징조를 발견하였을 때는 즉시 응급조치를 취하고 발주처에게 보고하여야 하며, 설치현장에서 발생하는 일체의 사고 및 피해에 대하여 계약자가 책임을 진다.

라. 계약자는 설계도서의 내용이 상세하게 기술되지 않았거나 누락된 부분이 있더라도 시스템 성능을 완전하게 수행하기 위하여 설치에 필요한 사항이 추가 발생 시 계약자 부담으로 공급하여야 한다.

마. 계약자는 부득이한 사유로 설치가 곤란 할 때에는 발주처와 처리방법 등에   대하여 조치 전 사전 협의하여야 한다.

바. 계약자는 설치작업 중 또는 완료시 현장을 청결하게 하고 오물 등은 지정된 장소로 반출하여야 한다.

사. 계약자는 장비설치가 완료되면 발주처 담당자의 입회하에 시스템 동작시험을 하여야 하며, 이에 소요되는 부대비용은 계약자가 부담하여야 한다.

아. 시스템에 설치되는 각종 기자재는 KS 표시품 또는 동등이상의 제품과 부속을 사용하여야 하며, 주요 장비는 전자파 인증제품이어야 한다.

자. 서류에 명시된 품질이나 수량 또는 입찰내용에 대한 사항 중 상호 모순점이나 차이가 있을 때는 우수한 품질과 수량이 많은 쪽이 우선한다. 다만, 발주처에서 서면 지시한 사항은 예외로 한다.

차. 착공 후 7일 이내에 현장정밀 실사보고서를 작성하여 감독관에게 제출하여야 한다.

(현장작업 시 위치, 방법 등을 감독관 승인 후 작업)

7. 작업관련 시설물 보호

가. 착공 전 시설물 관리부서에 제반 허가관련 절차를 문의 수행하여야 하며, 추진 과정에서 절차 상 변경 요구가 있을 경우 이를 반영하여 시공하여야 한다.

나. 특정 시설물에 대한 사전 작업 요청을 받았을 경우에는 공사 감독관과 사전 협의하여 시행하여야 하며, 감독관 유고 시 긴급 공사를 시행하여야 할 경우에는 요청기관 관리부서 담당자의 서명 날인된 지시서를 받아 시행하여야 한다.

8. 공정관리

가. 계약자는 착공 시 관련 공정계획에 의한 예정공정표를 발주처에 제출하여야 한다.

나. 예정공정표에 의한 현장공정이 시행되어야 하며, 예정공정 미달 시에 그 사유를 발주처에 보고하여야 한다.

9. 설계변경

가. 기간변경

1) 수요기관 방침변경 또는 지시에 의하여 작업을 중단하였을 때

2) 계약이후 당초 수량이 현저하게 증감되었을 때

3) 천재지변으로 작업이 불가능할 때

4) 기타 현장여건 변동 등으로 사업기간 변경이 불가피하다고 인정될 때

나. 내역변경

1) 물가 변동 시에 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 행정예규 등 관련 규정에 따른다.

2) 당초 설계물량에 증감이 발생할 경우 실제에 맞춰 변경하며, 증감물량에 대한 단가는 관련법규 및 규정, 예규 등에 따른다.

3) 합리적인 사업목적 달성을 위하여 설계변경이 필요한 경우 계약자는 감독관과  사전협의 후 설계변경을 요청할 수 있으며, 감독관은 요청이 정당하고, 이로 인한 내역 변경이 필요하다고 판단되면 계약단가, 낙찰률, 조달단가, 공정 진행사항 등을 종합 고려하여 조정하고, 변경된 공정계획에 따라 사업을 시행하여야 한다.

4) 유관기관(통신사업자, 한국전력 등)과의 협의결과에 따른 공정변경 등 경미한 변경요인 발생 시에는 계약자 부담으로 사업 시행함을 원칙으로 한다.

5) 본 사업관련 수요기관의 방침이 변경되었을 때는 변경된 방침에 따라 설계변경 요청 할 수 있다.

10. 위반행위에 대한 조치

다음과 같은 위반행위가 발생하였을 때에는 계약 위반행위로 간주하여 관계규정에 의하여 조치할 수 있다.

가. 제반 지시사항을 특별한 사유 없이 기한 내 성실히 이행하지 않을 때

나. 계약기간 내에 완료할 능력이 없다고 인정되거나 현저하게 공정이 미달 될 때

다. 사업을 성실하게 수행하지 못하거나 부주의로 인한 과실이 인정될 때

라. 보안과 관련된 사항을 위반하였을 때

11. 교육훈련

계약자는 본 시스템 운용과 유지보수를 위하여 운영요원에게 시스템 관련 H/W 및 S/W에 대한 운영자 교육을 실시하여야 한다.

12. 하자보증 및 유지보수

가. 하자보증기간은 준공 검사일로부터 1년으로 한다.

나. 하자보증기간 중 하자가 발생한 때에는 천재지변이나 사용자의 부주의로 인한 사고를 제외하고, 계약자는 모든 사고에 대한 책임과 즉각 원상복구 또는 교체 의무를 다하여야 한다.

다. 하자보증기간 동안 장애 발생 시는 장애고장 통보를 받은 후 신속히 복구하여야 하고, 4시간이내에 처리하여야 하며, 처리가 불가능한 경우는 동종의 장비(부품)로 대체한다.

13. 시스템 업그레이드 지원

계약자는 CCTV 시스템 H/W의 사양변경, 개선(펌웨어버전 업그레이드 포함) 및 소프트웨어(S/W)의 일부 기능보완, 버전 업그레이드 시에 발주처와 협의하여 성실히 지원하여야 한다.

14. 관계기관

계약자는 본 사업 관계 기관의 인·허가 수속이 필요한 경우 발주기관과 협의 하여 신속히 추진하여야 하고, 이에 발생되는 경비는 계약자가 부담한다.

※ 단, 한국전력공사의 표준시설부담금은 발주기관이 부담한다.

15. 자료 제출

구 분	제 출 서 류	수 량
착공시	① 착공계, 현장대리인계, 재직증명서, 현장대리인 자격증 사본 ② 보안서약서(대표자, 참여인력), 계약산출내역서 ③ 노무비구분관리 및 지급확인제, 자재승인도서 ④ 자가망 한전제출서류(착공계)	각 2부
준공시	① 준공계, 준공검사원, 물품납품 내역서, 보안확약서, 노무비구분관리 및 지급확인서 ② 사진대지 ③ 자가망 한전제출서류(준공계-사진포함)	각 2부

※ 기타 발주처가 필요하다고 인정되는 서류

16. 설치 위치 : 【붙임1】 참조

Ⅲ. 특별 시방서

1. 총    칙

본 시방서는 2021년 생활안전 CCTV 설치공사와 관련 장비의 구성, 기능 및 기기의 특성에 대한 사항을 규정한다.

2. 시스템 요구사항

가. 일반 사항

관내에 고화질의 메가픽셀 카메라를 설치하여 현장영상을 실시간 전송하여, CCTV 통합관제센터에서 모니터링 및 저장, 검색, 백업 등 운영이 되어야 한다. 또한 향후 시스템 확장성을 고려하여 기능 및 최적 운영이 가능한 구성으로 구축되어야 한다.

나. 구축 요구사항

1) 신규로 설치하는 시스템은 통합관제시스템에 반드시 호환되는 시스템으로 구성되어야 한다.

2) 신규 설치되는 시스템은 메가픽셀 200만 화소급 이상의 카메라(초저조도)를 사용하며, 주․야간에 통행하는 모든 물체와 차량에 대하여 선명한 영상을 제공하여야 하며, 카메라 설치 위치는 시계확보가 용이한 곳을 선정하여 설치하고, 향후 유지관리를 감안하여 최적의 위치를 선정하여 발주처의 승인 후 설치하여야 한다.

3) 초저조도 메가픽셀 IR스피드돔카메라는 일체형으로 36배 광학줌, 12배 디지털줌을 사용하고, 초저조도 메가픽셀 컬러 LED IR카메라는 4배 광학줌, IP67이상 등급의 하우징을 사용하고, 일반 LED와 컬러 LED를 탑재하며, IR거리 컬러 30M, IR LED 50M 이상을 촬영할 수 있어야 한다.

4) 안개보정기술이 있어야 한다.

5) 카메라 설치위치가 확인될 수 있도록 모니터 상에 문자가 표출되며 녹화 시 시간이 기록 될 수 있도록 구성한다.

6) 준공 전 현장과 통합관제센터에 설치되어 있는 시스템 연동부분에 대하여 발주처의 사전운영 검사를 받아야한다.

7) 공사와 관련되는 관계기관의 허가 등에 대한 수속은 발주처의 협조를 받아 도급자가 하여야 한다.

8) 도급자는 설치장소 및 그 부근에 있는 지상 및 지하의 기존 시설에 대하여 지장을 주지 않도록 유의하여 설치하여야 한다.

9) 구조물 및 부대시설 설치

- 폴대 및 통신주에 제어함체, 카메라 안내판 등을 견고하게 부착한다.

- 한전주에서 제어함체 내부 누전차단기에 전원케이블을 설치 및 인입하여 전원 공급시 한전주에 부착된 모든 장비에 전원이 공급 되어야 한다.

- 케이블 가공 배선 시 조가선을 설치한 후 70cm마다 바인딩 작업을 하여 늘어짐이 없도록 하고 애자밴드를 사용한다.

- 케이블의 단말처리는 압착단자로 시행하며 충분히 절연처리를 하고 접촉저항을 최대한 억제시킨다.

다. 광케이블 자가망 구성

1) 가공 케이블 포설공사 시 작업자에 대한 사전 안전교육을 시행하고 안전요원을 배치 안전수칙에 따라 작업하여야 하며, 공중에 피해가 없도록 사전예방 조치하여야 한다.

2) 작업 전 책임자는 작업순서, 진행절차, 각 작업원의 건강 및 정신 상태 등을 잘 파악하고 있어야 하며, 부주의와 기술 미숙으로 인한 사고 발생 시 계약자 부담으로 조치하여야 한다.

3) 작업 참가자 전원은 반드시 안전장구 착용 후 작업하여야 한다.

4) 승주 시 또는 주상 작업 시 발판볼트의 안전 여부 및 기타 장착물의 상태도를 반드시 사전 확인하여야 하며, 작업 후에도 훼손되지 않도록 주의하여야 한다.

5) 케이블 작업 시 기온 변화에 대처 할 수 있도록 충분한 여장을 확보하여 포설하여야 한다.

6) 케이블 여장은 손으로 형태를 잡거나 조정하지 않도록 하고, 스파이럴 슬리브로 보호 조치하고 충분한 여장을 확보하여 지지물을 고정시킨다.

7) 케이블 포설 시 무리하게 잡아당기거나 손으로 구부리지 않도록 유의하여야 한다.

8) 케이블 가공 시에 입상, 입하 부분과 가공 직선거리에 주의 패찰을 설치하여 타 시설물과 구분할 수 있도록 한다.

9) 케이블 가설 시 「대구광역시 서구 – 한국전력공사 간 배전설비 제공 및 사용에 관한 협정서」 (이하 ‘배전설비협정서’라 한다)에 따라 공가설비를 승인받아야하며 배전설비 사용 승인일로부터 1개월 이내에 통신설비의 시설을 완료하여야 하며, 가설된 공가 설비에 대한 준공계(사진)을 제출하여야한다.

라. 공통사항

1) 준공 전 현장과 센터에 설치되어 있는 시스템 연동 부분에 대하여 수요기관의 사전 운영 검사를 받아야한다.

2) 계약자는 작업 시행 전 설치장소 및 그 부근에 있는 지상 및 지하 기존 시설에  대하여 사전조사 파악하여 서비스에 지장을 주지 않도록 유의하여 작업하여야 한다.

3) 구조물 및 부대시설 설치

- 타 시설물에 지장을 주지 않도록 한전주, 통신주 등 지주에 카메라, 카메라하우징, 제어함체, 카메라 안내판 등을 견고하게 부착한다.

- 한전주에서 제어함체 내부 누전차단기에 전원케이블을 설치 및 인입하여 전원 공급 시 한전주에 부착된 모든 전기기기에 전원이 공급 되도록 한다.

- 케이블 가공 배선 시 조가선을 설치한 후 70cm마다 바인드선을 묶어 주어 늘어짐이 없도록 하며 애자밴드를 사용한다.

- 케이블의 단말처리는 압착단자를 사용하여 충분히 절연처리를 하고, 접촉저항을 최대한 억제시킨다.

3. 주요 품목별 사양서

3.1 초저조도 메가픽셀 IR스피드돔 카메라

현장의 영상을 촬영하는 컬러 카메라로서 선명한 영상을 촬영한다.

1) 카메라

① 촬상소자 : 1/1.9" 2.38M Progressive Scan CMOS

② 유효화소수 : 200만화소(1920×1080)이상

③ 자동게인제어 : 자동/수동

④ 노출조정 : (완전)자동, 셔터우선, 조리개우선, 수동, 노출보정, 역광보정

⑤ 화이트밸런스 모드 : 자동, 실내, 실외, 원푸시, 자동

⑥ 렌즈유형 : 자동 초점 줌렌즈(AF)

⑦ 줌배율 : 광학 36배, 디지털 12배

⑧ 최저조도 : Color 0.005Lux(Night Color mode), B/W 0.0005Lux, 0Lux(IR)

⑨ 초점길이 : 36배, f=5.8~210mm, Autofocus

2) 비디오

① 영상압축포맷 : H.265, H.264, MJPEG

② 해상도 : 1080p(1920x1080) / 720p(1280x720) / D1 / CIF

③ 전송율 : 30fps@1080p, 720p, D1, CIF, QCIF

④ 영상스트리밍 : 멀티스트리밍(H.265, H.264, MJPEG), 개별 및 동시 전송

⑤ 이미지보정(영상보정) : Compression, Brightness, Sharpness, White Balance, Exposure control, Backlight compensation, Rotation, Mirroring, Text and image overlay, Defog(디지털 안개보정기능)

3) 오디오

① 오디오 입출력 : 외부 마이크 입력 또는 라인입력, 라인출력

② 오디오 압축포맷 : Twoway G.711 PCM 16KHz

4) 팬틸트

① 회전범위 : Pan 360°(Endless), Tilt -15°~180°(Flip)

② Speed : Preset 240°/sec, Manual 0.05°~180°/sec, Scan 1.4°~150°/sec

③ Preset : 255 프리셋

④ Group : 8 Groups

5) 네트워크

① 인터페이스 : 10/100Base-T(RJ-45)

② 네트워크 프로토콜 : ONVIF, TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP

③ 보안 : 패스워드 암호화

6) 센서/알람

① 센서입출력 : 1 입력, 1 출력

7) 제원

① 전원/사용전력 : AC24V, 36W

② 적외선 LED : IR 거리 300m(IR 거리 300M 시험성적서 인증제품)

③ Dynamic Slow Shutter 기능을 탑재하고, 멀티 한글 OSD 내장

④ Auto map 기능

⑤ Serial port : RS-485

⑥ 영상출력단자 : 1 BNC VBS 1.0Vp-p

⑦ 내부저장장치 : Micro SD Slot(메모리 불포함)

⑧ 하우징 : IP67, Anit-Vandal Proot, 알루미늄 다이캐스팅, 와이퍼

⑨ 위치값 제어를 위한 Encorder Motor 사용

⑩ 저소음 팬틸트 모터를 사용한 저소음 시험인증제품(Under 32.5dB)

⑪ 와이퍼 내장

* 자재승인시 제조사 정품인증서를 제출하여야 한다.

3.2 카메라 브라켓(회전)

1) 재질 : 알루미늄 다이캐스팅

2) 규격 : 97.5(W)*182(H), 4Hole(9mm)

3.3 초저조도 메가픽셀 칼라 LED IR카메라

현장의 영상을 촬영하는 컬러 카메라로서 선명한 영상을 촬영한다.

1) 카메라

① 촬상소자 : 1/1.9" 2M Exmor CMOS Sensor

② 유효화소수 : 200만화소(1920×1080)이상

③ 전자셔터속도 : 1/30~1/60,000sec, 1/25~60,000sec

④ 렌즈유형 : 자동 초점 줌렌즈(Auto Focus)

⑤ 줌배율 : 광학 4배, 디지털 12배

⑥ 최저조도 : Color 0.005lux, B/W 0.0005lux, 0lux(IR On)

⑦ 줌 배율 OSD 표출(1~4배 광학줌 OSD 표출)

2) 비디오

① 영상압축포맷 : H.265, H.264, MJPEG

② 해상도 : 1080p(1920x1080) / 720p(1280x720) / D1 / CIF

③ 전송율 : 30fps@1080p, 720p, D1, CIF, QCIF

④ 영상스트리밍 : 멀티스트리밍(H.265, H.264, MJPEG)

⑤ DNR, DSS(흔들림방지), AGC(자동게인조정), White Balance, HLC, WDR/BLC, ACE, Defog(안개보정), ICR

⑥ 그래픽 OSD : 화면의 상/하/좌/우 특정위치에 OSD 표출

3) 오디오

① 오디오 입출력 : 1IN 1OUT

② 오디오 압축포맷 : Twoway G.711 PCM 16KHz

4) 네트워크

① 인터페이스 : 10/100Base-T(RJ-45)

② 네트워크 프로토콜 : ONVIF, TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2/v3(MIB-2)

③ 보안 : HTTPS(SSL), ID/PW 암호화

5) 센서입출력 : 1입력, 1출력

6) 제원

① 전원 : DC12V / PoE

② 컬러 LED : 거리 30M

③ IR LED :  가시거리 50M

④ 영상출력단자 : 1 BNC VBS 1.0Vp-p

⑤ 내부저장장치 : Micro SD Slot(메모리 불포함)

⑥ 하우징 : IP67, Anit-Vandal Proot, 알루미늄 다이캐스팅

* 자재승인시 제조사 정품인증서를 제출하여야 한다.

3.4 카메라 폴대

1) 재질 : 용융도금

2) 규격 : 폴대-Φ150mm이상 6M, 가로암-Φ80mm이상 3~5M(현장여건반영)

3.5 폴대 기초대

카메라 폴대에 부착 된 부대시설을 지지하기에 충분한 구조이여야 한다.

⑴ 사양

① 재질	: STEEL

② 크기 : 1000(W)*1000(D)*1500(H)

③ 규격 : 450mm 원판,6방 L형 앵커볼트 3/4" 600mm 포함

④ 기초대는 현장타설을 원칙으로 한다.

3.6 카메라 가로암

1) 사양 : SUS, Φ80mm이상 1~2M

2) 설치위치 : 카메라 설치주 바닥면으로부터 5M 이상 설치(현장여건반영)

3.7 지역제어함체

현장 장비 등을 수용하는 것으로, 폴대, 한전주, 통신주, 가로등주에 견고하게 부착한다.

1) 구조/재질 : 전천후 이중구조 / SUS 1.2T 이상 / 방수등급 IP55 인증제품

2) 규격 : 450(W)*600(H)*250(D), 양문개방형

3) 냉각방식 : 강제 공냉식

4) 전원부 : 누전차단기 포함, 접지부스바, 접지형 콘센트(4구 이상) 장착

3.8 함체 좌대

1) 재질 : SUS 1.2T 이상

2) 규격 : 400(W)*200(H)*340(D)

3.9 IP 주

1) 재질 : 강관주

2) 규격 : 8M, 150mm

3.10 카메라 안내판

현장시스템이 설치되는 구조물에 안내판을 설치하여야 한다.

1) 사양

① 크기 : 가로암(양면)-650mm(가로)*250mm(세로),

지  주(단면)-400mm(가로)*600mm(세로)

② 색상	: 황색(색번호 13538) 바탕 / 흑색(색번호 17038) 글씨

③ 판의 재질	: 알루미늄

④ 내용	: CCTV 설치안내 및 기타 발주처가 정한 내용

⑤ 제작 전에 반드시 감독관과 협의하여 제작한다.(관리번호 부여)

3.11 산업용광스위치

1) 성능

가) Switching Capacity: 28Gbps 이상

나) Throughput: 20.8Mpps 이상

2) Interface

가) 총 포트수: 10포트 (Combo 포트 제외)

나) 2.5Gbps 또는 1Gbps 2포트 SFP 지원

다) 10/100/1000Mbps 8포트 RJ-45 지원

3) 기능

가) 8K개의 MAC Address Table 지원

나) 4,096개의 VLAN 지원 (IEEE 802.1Q)

다) MAC, Protocol, IP Subnet 기반의 VLAN 지원

라) GVRP 지원

마) STP, RSTP, MSTP 지원

바) G.8032 ERPS 지원. 링 절체시간 20ms 미만(최대 50node기준)

사) 광 바이패스 기능 지원(내장형)

아) Self-Loop Detection 기능 지원

자) IGMPv2, IGMPv3 Snooping, MLDv1, MLDv2 Snooping 지원

차) Traffic Classes 최대 8개의 Queue 지원. Port Priority 지원

카) Unicast, Multicast, Broadcast Storm Control 지원

타) Port/Queue Shaping 지원

파) DiffServ, Tag Remarking 지원

하) IEEE 802.1X, ACL, Radius, TACACS+ 등의 보안기능 지원

거) IEEE 1588 Precision Time Protocol, OAM 등의 기능 지원

너) IEEE 802.1ab LLDP(Link Layer Discovery Protocol) 지원

더) CLI, Telnet, SNMPv1/v2c/v3, Web based Management 등의 관리기능 지원

러) 이벤트 발생시 알람용 릴레이 출력 접점 지원

머) Rack Mount 또는 Panel Mount의 쉬운 설치

버) CCTV 함체에 설치가 가능한 크기의 제품(부속설비 포함)

4) 기타사항

가) 전원 이중화 지원. 무극성 지원(+/-가 바뀌어도 동작 가능)

나) 동작온도: - 40°C ~ 80°C

다) 동작온도에 따른 링 네트워크/바이패스/절체 테스트 공인기관의 시험성적서

* 자재승인시 제조사 정품인증서를 제출하여야 한다.

3.12 SFP MODULE

1) 전송속도 : 155Mb/s

2) 파장 : 1310nm

3) 모드 : 싱글모드, SC TYPE

4) 광전송거리 : 20Km

3.13 MINI FDF

1) 4코어용, (W)150*(D)123*(H)41mm

2) SC TYPE

3.14 부대공사

1) 광점퍼코드	: SC-LC-2C-SM-3M

2) 광피그테일	: SC-1C-SM-1.5M

3) 광케이블	: 옥외 가공용, SM, 4C

- 광케이블 외피 색띠: SKY BLUE(밝은 하늘색) 색상 삽입(띠넓이 3mm)

- 광케이블 표시: 대구광역시, 제조사, 케이블명(코아수)을 1m 간격으로 표시

4) 전원케이블(1)	: F-CV 2C/6㎟

5) 전원케이블(2)	: VCT 2C/1㎟, 출력용(카메라)

6) 통신케이블	: UTP Cable CAT.5E

7) 접지케이블	: F-GV 1C/6㎟

8) 접지동봉	: Φ14㎜*1000㎜, 1본

9) 방수FLEXIBLE	: 금속제가요전선관, 22mm

10) 광케이블 일반접속 및 케이블 최종시험

3.15 통신소프트웨어

1) 연동하고자 하는 모든 비디오서버 또는 IP 카메라의 접속 정보 (IP주소, 포트, ID, 암호 등)의 관리가 용이하도록 하며 백업을 통해 시스템 복구 시 간단한 작업으로 복구하기 쉽도록 제공한다. 관리자는 현장 단말기의 접속 정보를  입력, 편집, 삭제, 추가 할 수 있다. 단말기별로 위치 커맨드(위치 정보)를 입력하고, 단말기 기종 식별 코드 및 단말기 용도 코드를 입력할 수 있다.  용도 코드는 방범CCTV, 불법주정차, 쓰레기무단투기, 재난재해 등 단말기의 기본 용도를 확인하는데 사용한다.

2) 특정 카메라별로 실시간, PTZ, 검색 접근 권한을 부여할 수 있어야 한다.

3) 시스템 자원에 대한 감시, 제어, 최적화 관리가 가능 하여야 한다.

4) 단말장치의 데이터베이스 관리가 가능하여야 한다.

5) 최상위 관리자가 카메라별로 PTZ 등 조작 제한 가능하여야 한다.

6) 기존 운영중인 이노뎁 VURIX v1.0 장비활성화 라이센스

3.16 스마트관제서버 L/C

영상정보 제공장치(VMS, NVR 등)와 연결하여, 해당 장치에서 제공하는 영상데이터를 수신 및 분석하여, 움직이는 객체가 발생한 영상만을 선별해내는 소프트웨어이고, 기존 운영중인 스마트관제서버에 연동되어 운영되어야 한다.

3.17 스마트관제 인텔리넷 L/C

인공지능 기술을 활용하여 사람, 차량 등의 움직이는 객체가 출현한 CCTV 영상만을 선별하여, 관제요원의 모니터에 표출할 수 있도록 서비스하는 솔루션이며, 기존 운영중인 스마트관제서버에 연동되어 운영되어야 한다.

4. 사업 목록

연번	품 명	규 격	수량	단위	비고
1	초저조도 메가픽셀 IR스피드돔 카메라	1/1.9" 2.38M Progressive Scan CMOS, 1920x1080 해상도, f=5.8~210mm, 36배 광학줌, 안개보정기능, IR 거리(300M), 와이퍼 기능	대	15
2	카메라 브라켓(회전형)	알루미늄 다이캐스팅, 97.5(W)*182(H), 4Hole(9mm)	개	15
3	초저조도 메가픽셀 컬러 LED IR 카메라	1/1.9" 200만 화소, 1920x1080 해상도, 3.5~14mm, IP67, 컬러 LED 및 IR LED 탑재 IR거리 컬러 30M / IR LED 50M, 각도기포함	대	14
4	카메라 폴대	용융도금, POLE-150mm 6M, 가로암-80mm 3~4M (현장여건반영), 가로암지지대, 와이어포함	식	6
5	폴대 기초대	앙카볼트 및 기초대 포함 1000(W)*1000(D)*1500(H)mm	식	6
6	카메라 가로암	SUS 재질, 80mm(1~2M,현장여건반영)	식	15
7	지역제어함체	SUS 재질, 이중구조, 이중 잠금장치, 방수등급 IP55 양문개방형, 450(W)*600(H)*250(D)mm	개	19
8	함체 좌대	SUS 재질, 제작형, 400(W)*200(H)*340(D)	개	19
9	IP 주	강관주, 8M	본	5
10	카메라 안내판(1)	가로암 부착용, 650(W)*250(H), 양면, 알루미늄	개	20
11	카메라 안내판(2)	지주 부착용, 400(W)*600(H), 단면, 알루미늄	개	20
12	산업용광스위치	10/100/1000M TP 8포트+2.5Gbps 또는 1Gbps 2포트 광 바이패스 기능 지원(내장형)	대	30
13	SFP MODULE	전송속도 : 155Mb/s, 1310nm, 싱글모드, SC TYPE, 광전송거리 : 20Km	개	60
14	MINI FDF	4코어용, (W)150*(D)123*(H)41mm, SC TYPE	개	36
15	광점퍼코드	SC-LC-2C-SM-3M	개	36
16	광 PIG TAIL	SC-1C-SM-1.5M	개	144
17	광케이블	옥외 가공용, SM, 4C, 제작형, 대구시 자가망 표시케이블	M	3,021
18	전원케이블(1)	F-CV 2C/6㎟, 인입용	M	360
19	전원케이블(2)	VCT 2C/1㎟, 출력용(카메라)	M	405
20	통신케이블	UTP Cable CAT.5E	M	405
21	접지케이블	F-GV 1C/6㎟	M	133
22	접지동봉	14mm*1000㎜ * 1본	개	19
23	필름밴드	1400mm, SUS	개	100
24	방수 FLEXIBLE	금속제가요전선관, 22mm	M	232
25	통신소프트웨어	이노뎁, VURIX v1.0, 1ch 장비활성화	L/C	29
26	스마트관제서버 L/C	스마트관제서버 v3.0(SEAS-S v3.0), 관제솔루션	L/C	29
27	스마트관제 인텔리넷 L/C	스마트관제 인텔리넷 v2.0 [SEAS-X v2.0], 영상관리/관제솔루션	L/C	29
28	광케이블 일반접속	광접속	Core	144
29	광케이블 시험 및 측정	최종시험	Core	72

【붙임1】CCTV 설치 사업대상지

번호	행정동	설 치 주 소	카메라		설치 형태	자가망		비 고
			회전	고정		상위국	자가망 형태
1	내당2.3동	큰장로 61 (내당동 977-10)		1	통신주	32011	광(4C)
2	내당2.3동	달서로6길 15 (내당동 973-12)	1		통신주	30031	광(4C)
3	내당2.3동	달서로9길 29 (내당동 920-5)	1		통신주	31058	광(4C)
4	내당2.3동	큰장로25길 8-1 (내당동 1037-9)	1		한전주	31104	광(4C)
5	내당2.3동	달서로5길 29 (내당동 919-16)	1		한전주	31068	광(4C)
6	비산7동	서대구로 296 (비산동 882-5)	1	1	POLE	30628	광(4C)
7	비산7동	비산동 840-26		2	벽면	30629	광(4C)
8	평리1동	통학로 184 (평리동 852-5)	1		POLE	31109	광(4C)
9	평리2동	국채보상로66길 32 (평리동 1174-92)	1	1	POLE	30025	광(4C)
10	평리2동	국채보상로66길 25-24 (평리동 1130-87)	1		IP주 (신설)		KT 자가망
11	평리3동	서대구로38길 43-1 (평리동 1038-31)	1	1	POLE	30621	광(4C)
12	평리3동	서대구로36길 5 (평리동 1032-35)	1		통신주	30509	광(4C)
13	평리4동	국채보상로50길 49 (평리동 1224-6)	1	1	통신주	30747	광(4C)
14	평리4동	국채보상로48길 10 (평리동 1336-6)	1	1	POLE	30730	광(4C)
15	평리4동	평리로57길 54 (평리동 1415-5)		2	한전주	30020	광(4C)
16	평리4동	평리로57길 26 (평리동 1411-4)		2	통신주	31148	광(4C)
17	평리6동	평리동 449-6	1	1	POLE	신규 7번 현장	광(4C)
18	상중이동	새방로29길 3 (상리동 485-2)	1	1	POLE	30874	광(4C)
19	상중이동	새방로25길 20 (상리동 568)	1		통신주	30609	광(4C)
소 계			15	14	19개소 29대(회전15, 고정14)

【붙임2】 착공계 제출 시

보 안 서 약 서(대표자용)

본인은 2021년   월   일부로 대구 서구청과 계약한「2021년 생활안전 CCTV 설치공사」사업과 관련된 업무를 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을   엄숙히 서약합니다.

1. 본인은「2021년 생활안전 CCTV 설치공사」사업과 관련된 소관업무가 직무상 국가기밀 사항임을 인정하고 제반 보안관계규정 및 지침을 성실히 준수한다.

2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될 수 있음을 인식하고 재직 중은 물론 퇴직 후에도 알게 된 모든 기밀사항을 제3자에게 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.

3. 본인은 하도급 업체를 통한 사업 수행 시 하도급업체로 인하여 발생하는 위반사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

4. 본인은 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관계법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수 할 것을 서약한다.

2021년     월     일

서 약 자	소        속 :

(대   표)	직       위 :

성       명 :                  (서명)

생 년 월 일 :

서약집행자	소        속 :

(담당공무원)	직       위 :

성       명 :                  (서명)

생 년 월 일 :

【붙임3】 착공계 제출 시

(앞면)

보 안 서 약 서(참여인력용)

본인은 2021년   월   일부로 대구 서구청과 계약한「2021년 생활안전 CCTV 설치공사」사업과 관련된 업무를 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을   엄숙히 서약합니다.

1. 본인은「2021년 생활안전 CCTV 설치공사」사업과 관련된 소관업무가 직무상 국가기밀 사항임을 인정하고 제반 보안관계규정 및 지침을 성실히 준수한다.

2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가이익을 침해할 수도 있음을 인식하고 재직 중은 물론 퇴직 후에도 알게 된 모든 기밀사항을 제3자에게 일체 누설하지 아니한다.

3. 본인은 이 기밀을 누설한 때에는 아래의 관계법령에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.

가. 전자정부법 제35조(금지행위) 및 제76조(벌칙)

나. 개인정보보호법 제59조(금지행위)

2021년     월     일

서약자    소속          직급	생년월일

직위	성    명             (서명)

서  약    소속          직급

집행자                  직위	성    명             (서명)

※ 뒷면의 정보누출금지대상 및 추가 준수사항을 확인한 후 서약서에 서명할 것

(뒷면)

정보누출 금지대상

1. 기관(서구청) 소유 정보시스템의 내․외부 IP주소 현황

2. 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도

3. 사용자계정ㆍ비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보

4. 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물

5. 본 사업 결과물 및 프로그램 소스코드 등

6. 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황

7. 침입차단시스템ㆍ방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터ㆍ스위치 등 네트워크 장비 설정 정보

8.「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된  기관의 내부문서

9.「개인정보보호법」제2조제1호의 개인정보

10.「보안업무규정」제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제7조제3항의 대외비

11. 그 밖에 각급기관의 장이 공개가 불가하다고 판단한 자료

추가 준수사항

1. 대구광역시 서구 CCTV통합관제센터 출입 시 보안사항 및 담당 공무원의 지시에 따른다.

2. 대구광역시 서구 CCTV통합관제센터 내에서는 영상촬영기기·저장장치 반입 및 단독 행동을 하지 않으며, 적발 시 모든 책임은 본인이 진다.

3. 대구광역시 서구 CCTV통합관제센터 내의 실시간 영상자료, 녹화 영상자료, CCTV 시스템 및 인프라 운용 관련 일체의 기술정보, 기타 개인정보․비밀 등에 대하여 정보의 이용, 유출 또는 누설 시 형법 또는 개인정보보호법 등에 의하여 고발되며, 모든 책임은 본인이 진다.

4. 위 모든 준수사항 및 관계 규정을 위반한 때에는 관련법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수하고, 민·형사상 어떠한 제재조치를 당하여도 이의를 제기 하지 않는다.

【붙임4】 준공계 제출 시

보 안 확 약 서

본인(업체)은 대구 서구청과 계약한「2021년 생활안전 CCTV 설치공사」관련 사업(업무)을 수행 완료함에 있어, 다음 각 호의 보안사항에 대한 준수 책임이 있음을 서약하며, 이에 보안확약서를 제출합니다.

1. 본 업체(단체)는 업체 및 사업 참여자가 본 사업(업무) 수행 중 취득한 모든 자료를 반납 및 파기하였으며, 지득한 정보에 대한 유출을 절대 금지하겠습니다.

2. 본 업체(단체)는 하도급업체에 대해 상기 항과 동일한 보안사항 준수책임을 확인하고 보안확약서를 징구하였으며, 하도급업체가 위의 보안사항을 위반할 경우에 주사업자로서 이에 동일한 법적 책임을 지겠습니다.

3. 본 업체(단체)는 상기 보안사항을 위반할 경우에 귀 기관(서구청)의 사업에 참여제한 또는 기타 관련 법규에 따른 책임과 손해배상을 감수하겠습니다.

4. 본 업체(단체)는 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기 시켰을 경우에는 보안관계 제 법규에 의거 처벌받음은 물론 민·형사상 어떠한 제재조치를 당하여도 이의를 제기하지 않겠습니다.

2021년     월     일

확약업체(단체) 대표

소        속 :

직       위 :

성       명 :                  (서명)

생 년 월 일 :

대구광역시 서구청 귀중