『성우경로당 신축 공사 실시설계용역』

공사기간 산정내역

	대구광역시 서구청

■ 공사기간 산정기준

1. 근거 :「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」(국토교통부고시 제2021-1080호)

(공사기간 산출) 공사기간은 준비기간과 비작업일수, 작업일수, 정리기간을 포함하여 산출한다.

공사기간 = 준비기간 + 비작업일수 + 작업일수 + 정리기간

1) 준비기간

- 정의 : 착공초기 하도급업체의 선정, 발주청의 인·허가업무 지원, 도면 검토, 측량, 현장사무소, 가설건물의 설치, 건설자재·장비 및 공장제작 조달 등 본 공사의 착수준비에 필요한 기간

① 공사 항목별 공종이 상이하여 그룹별로 묶어 진행할수 있을것으로 보이고 그 중 처음 공통적으로 재료나 자재 준비 등을 위해 필요한 준비기간이 필요.

② 준비기간의 산정 : 자재 준비 장비 운반 및 현장사무소 또는 가설물의 설치 등

2) 비작업일수

① 비작업일수는 건설현장의 공사 진행이 불가능한 날짜를 말하며, 제8조의 ‘법정공휴일수’와 제9조에 따른 ‘기후여건으로 인한 비작업일수’의 합계에서 중복일수를 제외하여 산정한다. 단 중복일수 산정은 소수점 첫째자리에서 반올림한다.

② 비작업일수는 주공정(critical path)에 대하여 검토하며, 월별 비작업일수가 주 40시간 근무제에 따른 비작업일수보다 작을 경우에는 주 40시간 근무제에 따른 비작업일수를 적용한다.

작업일수 = 달력일수 – 비작업일수

비작업일수 = A + B – C

A : 해당 월에 기후여건으로 인해 계획된 공종의 작업이 불가능한 일수

B : 해당 월에 포함된 법정 공휴일수

C : 월별 중복일수(C) = A × B ÷ 달력일수 (소수점 첫째자리에서 반올림)

[예시] 1월에 시행되는 토공사

토공사가 불가능한 강우일수(강수량 10㎜/일 이상) : 7일          …… A

법정공휴일수 : 4일(일요일)+1일(신정) = 5일                     …… B

중복일수 : 7일(A) × 5일(B) ÷ 31일(달력일수) ≒ 1.1일(1일 적용)   …… C

1월 비작업일수 = 7일 + 5일 – 1일 = 11일 > 8일

※ 주 40시간 근무제에 따른 비작업일수 = 8일

1월 작업일수 = 31일 – 11일 = 20일 (∴가동률 = 20/31 = 65%)

○ 법정공휴일수 계산

별표 1. 법정 공휴일수

구분	월간 법정공휴일												소계
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2023년												6	6
2024년	5	7	6	4	7	6	4	5	8				52
합계	5	7	6	4	7	6	4	5	8	0	0	6	58

○ 기후여건으로 인한 비작업일수 계산

별표 2. 기상상태에 따른 지역별 비작업일수(2010~2019년)

① 혹서기 : 33°C 이상

도	지역	월평균 기상데이터												소계
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
대구광역시	대구	0	0	0	0	1.1	3.2	13.2	14.6	1.0	0	0	0	33.1

② 동절기 : 일최고기온 0°C 이하

도	지역	월평균 기상데이터												소계
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
대구광역시	대구	2.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1	4.5

③ 동절기 : 신적설 5㎝ 이상

도	지역	월평균 기상데이터												소계
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
대구광역시	대구	0.1	0.1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.6

④ 일강수량 : 5㎜ 이상

도	지역	월평균 기상데이터												소계
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
대구광역시	대구	1.0	1.8	3.9	5.1	3.6	3.9	6.4	7.7	5.0	3.0	2.2	1.3	44.9

⑤ 일최대순간풍속 : 15m/s 이상

도	지역	월평균 기상데이터												소계
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
대구광역시	대구	0.6	0.4	0.7	0.8	0.7	0	0.3	0.5	0.1	0.2	0.2	0.7	5.2

3) 비작업일수 산정

- 비작업일수 :  100일

기간 기후여건		2023년			2024년												2025년			계
		10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월
		0	0	31	31	29	31	30	31	30	31	31	0	0	0	0	0	0	0	275
공휴일 (일요일+휴일)(A)		0	0	6	5	7	6	4	7	6	4	5	0	0	0	0	0	0	0	50
기후여건	혹서기(33℃이상)	0	0	0	0	0	0	0	1.1	3.2	13.2	14.6	0	0	0	0	0	0	0	32.1
	동절기(일 최고 기온 0℃ 이하)	0	0	1.1	2.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.5
	동절기 (신적설 5㎝ 이상)	0	0	0.2	0.1	0.1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6
	일강수량 (5㎜이상)	0	0	1.3	1.0	1.8	3.9	5.1	3.6	3.9	6.4	7.7	0	0	0	0	0	0	0	34.7
	일최대순간 풍속: 15㎧	0	0	0.7	0.6	0.4	0.7	0.8	0.7	0	0.3	0.5	0	0	0	0	0	0	0	4.7
	기후여건에 의한 비작업일수(B)	0	0	3.3	4.4	3	4.8	5.9	5.4	7.1	19.9	22.8	0	0	0	0	0	0	0	76.6
계(A+B)		0	0	9.3	9.4	10	10.8	9.9	12.4	13.1	23.9	27.8	0	0	0	0	0	0	0	126.6
조정계		0	0	9	9	10	11	10	12	13	24	28	0	0	0	0	0	0	0	126
중복일수 (A×B÷달력일수)		0	0	3	4	1	1	1	1	1	1	1	0							14
비작업일수		0	0	22	24	12	9	5	5	9	5	9	0	0	0	0	0	0	0	100

4) 작업일수 산정 (공사항목별 정리기간 포함)

- 작업일수 : 125일

(1) 준비기간 : 20일

(2) 일반건축공사

구 분					산정기준	산정
공사기간	토목 공사	터파기				2일
		흙막이				0일
	건축 공사	기초공사			지내력 기초	7일
		골조 공사	지하층			0일
			지상층	1층		10일
				2층 이상	2층 : 10일 3층 이상 : 층당 9일	19일
				지붕층	철근콘크리트 지붕	10일
		마감공사	조적공사			10일
			미장공사			20일
			창호공사			15일
			방수공사			7일
			타일공사			5일
	토목공사					10일
	조경공사					10일
총 계						125

(3) 정리기간 : 30일

2. 성우경로당 신축 공사 실시설계용역 예상 공사기간

■ 공사기간은 준비기간, 비작업일수, 작업일수, 정리기간을 합산하여 산정.

준비기간	비작업일수	작업일수	정리기간	공사기간
20	100	125	30	275

공사기간 검토 결과 275일(약 9개월)의 공사기간이 필요할 것으로 예상됨.