정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	총 무 과	②담당자 (연락처)	부서장 : 행정5급 최정식 담당자 : 행정7급 신세정 (053) 663-2225
③정책사업명	상중이동청사 신축
④선정기준	10억원 이상의 건설공사	⑤사업기간	2016년 ~ 2017년
⑥주요내용	■ 추진배경 시설 노후에 따른 주민불편사항 해소와 주민자치센터 기능 강화를 위해 동 청사를 신축하여 주민 복지증진을 도모하고자 함 ■ 사업개요 ❍ 사업기간 : 2016년 ~ 2017년 ❍ 위 치 : 서구 중리동 1085-3번지 ❍ 규 모 : 대지 955㎡(289평), 연면적 999㎡(303평), 지상3층 ❍ 사 업 비 : 27억원(공사비 25, 설계 1, 감리 및 부대 1) ■ 추진현황 □ 2016. 1월 : 상중이동주민센터 신축계획 수립 ❍ 2016. 2월 : 설계 공모 ❍ 2016. 6월 : 설계용역 발주 ■ 향후계획 ❍ 2016. 9 ~10월 : 일상감사·계약심사 및 입찰 ❍ 2016. 11월 : 공사 착공 □ 2017. 6월 : 공사 준공