정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-3	담당부서 작성자	복지생활국/경제과 (이정숙/053-663-2655)
정 책 명	서부시장 프랜차이즈 특화거리 조성공사
사업개요	□ 추진배경 - 기능상실 전통시장에 외식 프랜차이즈를 접목하여 기능전환 및 상권 활성화 도모 □ 추진기간 : 2013. 3월～ 2015. 5월 □ 총사업비 : 950백만원(시비) □ 주요내용 ○ 기반시설 확충 및 옥상방수 등 환경개선, 19개업체 입점, 개장(5.22)
추진경과 및 사업 관련자	『별첨 작성』

【별첨】☞ 서부시장 프랜차이즈 특화거리 조성공사

추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 2013. 5. 2 : 대구광역시,프랜차이즈협회 특화거리 대상지 선정 - 관련자 : 경제과 주무관 이정숙, 계장 송기섭, 과장 윤송규, 국장 길용식, 부청장 이재경, 청장 강성호 ○ 2013.10. 2 : 대구광역시 특화거리 조성 예산 교부 요청(800백만원) - 관련자 : 경제과 주무관 이정숙, 계장 박인규, 과장 윤송규, 국장 길용식, 부청장 이재경, 청장 강성호 ○ 2013.10.23 : 「서부시장 프랜차이즈 특화거리 조성」 기본계획 수립 - 관련자 : 경제과 주무관 이정숙, 계장 박인규, 과장 윤송규, 국장 길용식, 부청장 이재경, 청장 강성호 ○ 2013.11.25 : 주민설명회 개최 - 관련자 : 경제과 주무관 이정숙, 계장 박인규, 과장 윤송규, 국장 길용식, 부청장 이재경, 청장 강성호 ○ 2013.11월～12월 : 사업추진 동의서 확보/62개 점포주 - 관련자 : 경제과 주무관 이정숙, 계장 박인규, 과장 윤송규, 국장 길용식, 부청장 이재경, 청장 강성호 ○ 2014. 7.11 : 「서부시장 프랜차이즈 특화거리 조성」 시행계획 수립 - 관련자 : 경제과 주무관 이정숙, 계장 박인규, 과장 윤송규, 국장 길용식, 부청장 이재경, 청장 류한국 ○ 2014. 9월 : 점포주와 입점업체 임대차 계약체결 - 관련자 : 경제과 주무관 이정숙, 계장 박인규, 과장 윤송규, 국장 김동국, 부청장 이재경, 청장 류한국 ○ 2014.10.14 : 공사 착수 - 관련자 : 경제과 주무관 이정숙, 계장 박인규, 과장 윤송규, 국장 김동국, 부청장 이재경, 청장 류한국 ○ 2014.10.23 : 측면비가림시설, 보수보강 사업비 추가확보(150백만원) - 관련자 : 경제과 주무관 이정숙, 계장 박인규, 과장 최진욱, 국장 김동국, 부청장 이재경, 청장 류한국 ○ 2015. 2.27 : 공사완료 - 관련자 : 경제과 주무관 이정숙, 계장 박인규, 과장 최진욱, 국장 김동국, 부청장 이재경, 청장 류한국