[별지 제2호]

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-08	담당부서 작성자	(교통과) (석경미/663-3013)
정 책 명	내당동 무침회골목 공영주차장 조성사업
사업개요	□ 추진배경 ○ 주차공간이 부족한 노후주택 밀집지역에 공영주차장을 조성하여 주차난 해소와 상가지역 방문객 주차편의 제공 □ 추진기간 : 2016.7.1. ~ 2018.5.1. □ 총사업비 : 3,186백만원 □ 주요내용 ○ 위 치 : 내당동 885번지 외 2필지 ○ 면 적 : 1,161㎡, 주차면수 32면 ○ 준공일 : 2018. 5. 1.
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘16.07.29 : 공영주차장 조성 기본계획 수립 - 관련자 : 교통과 주무관 김현숙, 담당 김대웅, 과장 김천호, 국장 김영근, 부청장 진용환, 구청장 류한국 ○ ‘16.10.19 : 도시관리계획 열람공고 및 주민의견 청취 - 관련자 : 교통과 주무관 김현숙, 담당 김대웅, 과장 김천호 ○ ‘16.12.16 : 실시계획 인가고시 - 관련자 : 교통과 주무관 김현숙, 담당 김대웅, 과장 김천호 ○ ‘16.12.20 : 보상계획 - 관련자 : 교통과 주무관 김현숙, 담당 김대웅, 과장 김천호 국장 김영근, 부청장 진용환, 구청장 류한국 ○ ‘17. 1. 1 : 관련자 변경 교통과 담당 강태룡, 국장 이춘우 ○ ‘17.01.31 : 감정평가의뢰 - 관련자 : 교통과 주무관 김현숙, 담당 강태룡, 과장 김천호 국장 이춘우, 부청장 진용환, 구청장 류한국 - 감정평가 : ㈜감정평가법인 대일감정원 ㈜태평양 감정평가 법인 홍익감정평가사 ○ ‘17.03.02 : 보상금 결정 - 관련자 : 교통과 주무관 김현숙, 담당 강태룡, 과장 김천호 국장 이춘우, 부청장 진용환, 구청장 류한국 ○ ‘17.07.01 : 관련자 변경 교통과 과장 김대웅, 부청장 김종도 ○ ‘17.09.11 : 실시설계 용역 - 관련자 : 교통과 주무관 김현숙, 담당 강태룡, 과장 김대웅 - 설계자 : ㈜고려기술단(대표 공창환) ○ ‘18. 1. 1 : 관련자 변경 교통과 주무관 석경미, 담당 박완우 ○ ‘18.01.02 : 반고개 무침회골목 공영주차장 착공 - 관련자 : 교통과 주무관 석경미, 담장 박완우, 과장 김대웅, 국장 이춘우, 부청장 김종도, 구청장 류한국 - 시공자 : 성복건설(대표 신용식), 삼화기연(대표 박미자), 한국알파시스템(대표 김재용) - 감독자 : 교통과 주무관 이기철, 경제과 주무관 엄혜영, 문화홍보과 주무관 전용조 ○ ‘18. 5. 1 : 내당동 무침회골목 공영주차장 준공