[별지 제2호]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-09	담당부서 작성자	사회복지과 김동환/663-2532
정 책 명	비원노인복지관 건립
사업개요	□ 추진배경 ○ 매년 증가하는 노인들의 다양한 복지욕구를 체계적이고 복합적으로 수용할 수 있는 노인복지관을 권역별로 신설 하여 노인종합복지 서비스에 기여하고자 함. □ 추진기간 : 2016. 9월 ~ 2018. 5월 □ 총사업비 : 4,100백만원(건축비 3,800, 장비비 300) □ 주요내용 ○ 위치 : 서대구로 268(비산동 840-21번지) ○ 규모 : 부지 1,169㎡, 연면적 1,383.75㎡(지상3층)
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 2016. 7월 : 비원노인복지관 건립 기본계획 - 관련자 : 사회복지과 노인복지담당 김동환 과장 최윤영, 국장 윤송규, 부청장 진용환, 청장, 류한국 ○ 2016. 9월 : 비원노인복지관 건립 공유재산심의회 심의요구 - 관련자 : 사회복지과 노인복지담당 김동환, 과장 최윤영 ○ 2016. 11월 : 비원노인복지관 건립 지방재정 투자심사 의뢰 - 관련자 : 사회복지과 노인복지담당 김동환, 과장 최윤영 ○ 2017. 1월 : 비원노인복지관 변경계획 수립 - 관련자 : 사회복지과 노인복지담당 김동환, 과장 최윤영, 국장 윤송규, 부청장 진용환, 청장, 류한국 ○ 2017. 1월 : 비원노인복지관 건립예정지 분할측량 의뢰 - 관련자 : 사회복지과 노인복지담당 김동환, 과장 최윤영 ○ 2017. 1월 : 분할측량 완료 - 관련자 : 지적기사 이**, 지적기사 김** ○ 2017. 1월 : 서구의회 의안 상정 의뢰(공유재산 변경계획(안)) - 관련자 : 사회복지과 노인복지담당 김동환, 과장 최윤영 ○ 2017. 1월 : 비원노인복지관 건립 변경계획에 따른 『공유재산심의회』 심의 요구 - 관련자 : 사회복지과 노인복지담당 김동환, 과장 최윤영 ○ 2017. 2월 : 도시관리계획(안) 열람공고 및 주민의견 청취 - 관련자 : 사회복지과 노인복지담당 김동환, 과장 최윤영 ○ 2017. 2월 : 비원노인복지관 도시관리계획 결정(변경)안에 관한 검토의견 및 조치계획 제출 - 관련자 : 사회복지과 노인복지담당 김동환, 과장 최윤영 ○ 2017. 2월 : 비원노인복지관 도시관리계획 결정(변경)안에 관한 검토의견 및 조치계획 제출 - 관련자 : 도시재생과 오다해, 도시기획담당 이창현, 과장 이동중 ○ 2017. 3월 : 비원노인복지관 도시관리계획 결정(변경)안에 관한 검토의견 회신 - 관련자 : 토지정보과 김영철, 지적담당 천호영, 과장 이영희 ○ 2017. 3월 : 비원노인복지관 도시관리계획 결정(변경)안에 관한 검토의견 및 조치계획 제출 - 관련자 : 도시공원과 권정숙, 공원녹지담당 김창모, 과장 정오성 ○ 2017. 3월 : 도시관리계획(변경)안 區 도시계획위원회 개최 요구 - 관련자 : 사회복지과 노인복지담당 김동환, 과장 최윤영 ○ 2017. 4월 : 2017년 제2회 서구 도시계획위원회 심의 결과 통보(비원노인복지관) - 관련자 : 도시재생과 오다해, 도시기획담당 이창현, 과장 이동중 ○ 2017. 6월 : 건축협의(신축)에 따른 협의 - 관련자 : 건축주택과 이장호, 건축담당 서창덕 ○ 2017. 6월 : 비원노인복지관 신축부지 건축협의에 대한 회신 - 관련자 : 사회복지과 김동환, 과장 최윤영 ○ 2017. 9월 : 착공 - 시공자 □ 건축,기계설비,조경 : 행복도시건설㈜(소장 임재길, 대표 박연호) □ 전기 : 성화전설(소장 황의식, 대표 노영숙) □ 통신 : 중앙전자통신(소장 이동달, 대표 이춘식) □ 소방 : ㈜삼부전력(소장 배복열, 대표 이진우) - 감리자 □ 건축, 기계설비, 조경 : 건축사사무소 터애(이천희) □ 전기 : ㈜가람기술단(소장 김맹중, 대표 강봉기) □ 소방 : ㈜기성E&C(박정현) - 공사감독 □ 건축주택과 김수정(건축), 도시재생과 이승민(조경), 교통과 진혜민(기계), 경제과 정윤석, 엄혜영(전기), 문화홍보과 김광식(통신) ○ 2018. 2월 : 비원노인복지관 민간위탁 추진계획(안) - 관련자 : 사회복지과 김성희, 노인복지담당 김동환, 과장 최윤영 복지생활국장 김미경, 부구청장 김종도, 구청장 류한국 ○ 2018. 2월 : 「비원노인복지관 건립 전기공사」에 따른 무대조명장치 설계변경 요청 - 관련자 : 사회복지과 김성희, 노인복지담당 김동환, 과장 최윤영 ○ 2018. 2월 : 서구의회 의안 상정 의뢰(비원노인복지관 민간위탁 추진계획(안)) - 관련자 : 사회복지과 김성희, 노인복지담당 김동환, 과장 최윤영 ○ 2018. 3월 : 건축(증축)행위 동의 요청 - 관련자 : 사회복지과 김성희, 노인복지담당 김동환, 과장 최윤영 ○ 2018. 2월 :「비원노인복지관 건립 전기(통신,소방)공사」에 키폰주장치 등 설계변경 요청 - 관련자 : 사회복지과 김성희, 노인복지담당 김동환, 과장 최윤영 ○ 2018. 4월 : 비원노인복지관 위탁운영법인 선정계획(안) - 관련자 : 사회복지과 김성희, 노인복지담당 김동환, 복지생활국장 김미경, 부구청장 김종도, 구청장 류한국 ○ 2018. 5월 : 비원노인복지관 위탁운영법인 수탁자선정심의위원회 구성 및 선정심사 계획(안) - 관련자 : 사회복지과 김성희, 노인복지담당 김동환, 과장 최윤영 복지생활국장 김미경, 부구청장 김종도, 구청장 류한국 ○ 2018. 5월 : 비원노인복지관 위․수탁 계약(안) - 관련자 : 사회복지과 김성희, 노인복지담당 김동환, 과장 최윤영 복지생활국장 김미경, 부구청장 김종도 ○ 2018. 5월 : 준공 - 준공검사자 □ 건축 : 건축주택과 유선길 □ 기계(소방) : 총무과 김재곤 □ 전기(소방) : 총무과 황태원 □ 정보통신 : 문화홍보과 임종오 □ 조경 : 도시공원과 류수원