정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	생활권 쌈지공원 조성(빈집 연계사업)
② 추진배경	주민들에게 휴식 및 여가 공간을 제공할 수 있는 생활권 쌈지 공원을 조성하고, 도심경관 및 주거환경을 향상하기 위해서는 빈집 정비가 필요
③ 사업개요	· 사업기간 : 2022. 3월 ~ 11월 · 대 상 지 : 비산2.3동 7-5번지, 7-7번지(단층주택 2동) · 사업규모 : A=163㎡(49평) · 사 업 비 : 금500백만원(구비, 토지 및 건물보상 400, 공사비 100) · 사업내용 : 토지 매입 및 건물 철거 후 쌈지공원 조성 ※ 빈집정비 활성화 사업(건축주택과)과 연계
④ 사업부서	도시공원과		⑤ 담당자	녹지5급 예병관 녹지7급 김지은
⑥ 선정기준	1억원 이상의 다수 구민 복지 증진 정책		⑦ 사업기간	2022. 3월 ~ 12월
<그간 주요 추진내용>
○ 생활권 쌈지공원 조성계획 - 빈집정비 활성화 사업 연계 - (도시공원과-2958)		‘22.03.21.	류한국 구청장 성임택 부구청장 허만근 국장 예병관 과장 이윤영 팀장
○ 생활권 쌈지공원 조성사업(빈집정비사업 연계)관련 토지소유주 의견 조회 (도시공원과-3848)		‘22.04.12.	예병관 과장 이윤영 팀장
○ 생활권 쌈지공원 조성 공사 편입 토지 보상 계획 알림 및 감정평가업자 추천 요청(도시공원과-6383)		‘22.06.23.	예병관 과장 윤대모 팀장 박준선 주무관
○ 생활권 쌈지공원 조성 공사 편입 토지 및 건물 감정평가 의뢰 (도시공원과-6396)		‘22.06.23.	예병관 과장 윤대모 팀장 박준선 주무관

○ 생활권 쌈지공원 조성 공사 부지 편입 토지 보상 협의 요청 (도시공원과-7408)	‘22.07.19.	예병관 과장 윤대모 팀장 박준선 주무관
○ 생활권 쌈지공원 조성 공사 편입토지 보상액 산정 감정평가 수수료 지출 (도시공원과-7495)	‘22.07.21.	예병관 과장 윤대모 팀장 박준선 주무관
○ 생활권 쌈지공원 조성사업 보상금 결정 및 지출(비산동 7-7번지) (도시공원과-8310)	‘22.08.18.	성임택 부구청장 허만근 국장 예병관 과장 김경애 팀장 김지은 주무관
○ 생활권 쌈지공원 조성사업 보상금 결정 및 지출(비산동 7-5번지) (도시공원과-8322)	‘22.08.18.	성임택 부구청장 허만근 국장 예병관 과장 김경애 팀장 김지은 주무관
○ 등기촉탁 대행 수수료 지출 (도시공원과-8495)	‘22.08.25.	예병관 과장 홍순철 팀장 김지은 주무관
○ 비산2·3동 빈집 철거 공사 실시설계 용역 시행 (도시공원과-8638)	‘22.08.30.	윤대모 팀장 김경애 팀장 홍순철 팀장 김지은 주무관
○ 계약 의뢰[비산2·3동 빈집 철거 공사 실시설계 용역] (도시공원과-8639)	‘22.08.30.	윤대모 팀장 김경애 팀장 홍순철 팀장 김지은 주무관
○ 북비산로77길 3-1, 3-3 건축물 철거 공사 시행 (도시공원과-9732)	‘22.10.04.	허만근 국장 예병관 과장 김경애 팀장 홍순철 팀장 김지은 주무관
○ 북비산로77길 3-1, 3-3 건축물 철거 공사 지정폐기물(폐석면) 철거 용역 시행 (도시공원과-9739)	‘22.10.04.	예병관 과장 김경애 팀장 홍순철 팀장 김지은 주무관
○ 북비산로77길 3-1, 3-3 건축물 철거 공사 지정폐기물(폐석면) 운반 및 처리 용역 시행 (도시공원과-9727)	‘22.10.04.	예병관 과장 홍순철 팀장 김지은 주무관
○ 북비산로77길 3-1, 3-3 건축물 철거 공사 건설폐기물 운반 및 처리 용역 시행 (도시공원과-9728)	‘22.10.04.	예병관 과장 홍순철 팀장 김지은 주무관
○ 계약 의뢰[북비산로77길 3-1, 3-3 건축물 철거 공사] (도시공원과-9802)	‘22.10.05.	예병관 과장 홍순철 팀장 김지은 주무관
○ 계약 의뢰[북비산로77길 3-1, 3-3 건축물 철거 공사 지정폐기물 (폐석면) 철거 용역] (도시공원과-9803)	‘22.10.05.	예병관 과장 홍순철 팀장 김지은 주무관
○ 계약 의뢰[북비산로77길 3-1, 3-3 건축물 철거 공사 지정폐기물 (폐석면) 운반 및 처리 용역] (도시공원과-9804)	‘22.10.05.	예병관 과장 홍순철 팀장 김지은 주무관
○ 북비산로77길 3-1, 3-3 건축물 철거 공사 가연성폐기물 운반 및 처리 용역 시행 (도시공원과-10196)	‘22.10.17.	예병관 과장 김경애 팀장 홍순철 팀장 김지은 주무관
○ 계약 의뢰[북비산로77길 3-1, 3-3 건축물 철거 공사 가연성폐기물 운반 및 처리 용역] (도시공원과-10197)	‘22.10.17.	예병관 과장 김경애 팀장 홍순철 팀장 김지은 주무관
○ 생활권 쌈지공원 조성사업에 따른 주민의견수렴 협조 요청 (도시공원과-10380)	‘22.10.20.	예병관 과장 홍순철 팀장 김지은 주무관
○ 비산2·3동 쌈지공원 조성공사 시행 및 관급자재 구입 (도시공원과-11188)	‘22.11.10.	허만근 국장 예병관 과장 김경애 팀장 홍순철 팀장 김지은 주무관
○ 착공[비산2·3동 쌈지공원 조성공사] (도시공원과-11280)	‘22.11.14.	예병관 과장 홍순철 팀장 김지은 주무관
○ 준공[비산2·3동 쌈지공원 조성공사] (도시공원과-12090)	‘22.12.12.	예병관 과장 홍순철 팀장 김지은 주무관