정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	․ 북비산로(서평초교~북비산네거리 구간) 간판개선사업
② 추진배경	․ 서대구역 개통에 맞추어 북비산로『서평초교 ~ 북비산네거리』구간의 낡고 무질서한 간판을 새롭게 재정비하여 시민들에게 아름답고 쾌적한 도시 이미지를 제공하고 지역상권 활성화를 도모하고자 함.
③ 사업개요	․ 사업구간 : 서평초교 ~ 북비산네거리 ․ 길 이 : 4.40km(도로 양측) ․ 사업체수 : 262개소 ․ 개체대상 : 간판 370개(벽면간판 282 / 돌출간판 88) ․ 사 업 비 : 1,200백만원
④ 사업부서	서구청 도시재생과		⑤ 담당자	행정5급 이광호 행정8급 김태복
⑥ 선정기준	10억원 이상의 사업		⑦ 사업기간	2022년 1월 ~ 12월
<그간 주요 추진내용>
〇 간판개선사업 추진계획 수립 (도시재생과-979)		‘22. 1. 24.	성임택 부구청장(구청장 대결) 허만근 국장 김현식 과장 한미향 과장 황두철 과장 양정인 팀장 배창석 팀장 김태복 주무관
〇 계약심의위원회 심의요청 및 개최		‘22. 2. 22.	김현식 과장 배창석 팀장 김태복 주무관
〇 제안서 심사 및 평가		‘22. 4. 12.	김현식 과장 배창석 팀장 김태복 주무관
〇 협상 및 계약체결 (도시재생과-4389)		‘22. 4. 19.	김현식 과장 배창석 팀장 김태복 주무관
〇 주민의견 수렴·동의서 징구		‘22. 5. ~ 7.	배창석 팀장 김태복 주무관
〇 간판철거 및 제작설치		‘22. 8. ~ 11.	이광호 과장(‘22. 7. 1. ~ ) 배창석 팀장 김태복 주무관
〇 준공		‘22. 12. 16.	이광호 과장(‘22. 7. 1. ~ ) 배창석 팀장 김태복 주무관