설   계   설   명   서

1. 공 사 명 : 2024년 생활환경숲 조성사업

2. 위    치 : 대구광역시 서구 비산7동 2982 일원 (염색산업단지 달서천로 가로변) (L=880m)

3. 목    적 : 본 공사는 관내 염색산업단지와 인접한 달서천로 가로수 하부에 띠녹지를 추가 조성하여 녹지공간을 확충함으로 도시경관 향상 및 악취 저감 효과에 기여하고자 하는데 그 목적이 있음

4. 공사개요

① 조경토공 : 보도용블럭철거 363㎡, 폐기물상차 22㎥, 스텐엣지 430.4m, 수목보호대틀 9개소, 터파기 35㎥, 사토운반 35㎥, 복토(마사토) 35㎥, 폐콘크리트 50Ton. 임목폐기물 0.15Ton

② 식 재 공 : 교목 – 버즘나무 9주, 이팝나무 4주

관목 - 4종 4,000주 (조팝나무 1,140주, 황금사철나무 1,020주, 화살나무 850주, 홍가시(레드로빈) 990주)

왕마사 멀칭 105㎡

이팝나무 제거 3주, 뿌리분 제거 1주, 수목보호판 재설치 1개소

5. 예정공정표

구 분	구 분 보 할	착공5일		착공10일		착공20일		착공30일		착공40일		비 고
조 경 토 공	30.0	5.0		10.0		10.0		2.5		2.5
식 재 공	70.0			15.0		25.0		25.0		5.0
계	100.0	5.0		25.0		35.0		27.5		7.5
누 계		5.0		30.0		65.0		92.5		100.0

6. 공사기간

본 공사는 착공일로부터 40일간으로 한다. 단, 천재지변이나 이상천후로 인하여 작업이 불가능하였을 때는 이에 해당하는 기간만큼 발주기관의 승인을 득한 후 공사기간을 연장할 수 있다.

7. 설계변경

가. 설계변경 사유

시공자는 다음과 같은 사유가 발생하여 설계도서의 변경이 불가피할 경우에는 발주청 승인을 득하여 변경시행할 수 있다.

(1) “공사계약 일반조건 제19조 제1항”에 따라 시공자가 발주청에 통지한 다음 각호의 사유

∙설계도서 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 때

∙ 지질·용수 등 공사현장의 상태가 설계도서와 다를 때

(2) “공사계약 일반조건 제19조 제1항”에 따라 발주청이 시공자에게 통보한 다음 각호의 사유

∙ 당해 공사의 일부변경이 수반되는 추가공사의 발생

∙ 특정계획의 변경

∙ 공정계획의 변경

∙ 시공방법의 변경

∙ 기타 공사의 적정한 이행을 위하여 변경이 필요한 시공

(3) 법규우선준수에 따라 설계도서의 내용이 관련 볍규 및 조례와 다른 사항

(4) 본 시방서 공사협의 및 조정에 따른 설계변경

(5) 설계도서와 당해 공사의 지급자재 구입계약서 및 시방서가 정합되지 않는 사항

(6) 기타사항

∙ 설계당시 조사 불가능한 부분 및 조사 후 변경된 사항에 대하여는 실제에 맞추어 변경

∙ 골재원, 토취장 및 사토장 등의 위치, 운반거리 및 운반조건이 단가설명시 내용과 상이할 경우

∙ 유용토 운반거리는 각종 운반거리가 변경될 경우

∙ 천재지변 등으로 인하여 설계변경이 불가피할 경우

∙ 확인측량 결과 지형의 차이 등 현지여건이 변경되었을 때

∙ 지자체 등 공공기관에서 고시하는 골재원석대의 고시단가 변동시

∙ 레미콘 슬럼프치는 공사시방서를 원칙으로 하며, 계절별 타설시기 타설조건에 따라 배합설계에 의해 기준 슬럼프치를 변경할때

∙ 발주청의 방침변경으로 인하여 설계변경이 불가피할 경우의 조사 반영 및 시공비 변경

∙ 기타 현장의 여건변동에 따라 계약내용이 변경 시

■ 공사기간 산출자료
ㅁ 공사기간 : 공사준비, 정리기간, 작업일수, 비작업일수의 합계로 산출
ㅁ 근거법령 : 공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토교통부 훈령 제1140호)
	1) 준비기간 :착공초기 하도급업체 선정, 설계도면 검토, 현장사무소 설치 등 본 공사 착수준비에 필요한 기간
	2) 비작업일수 및 작업일수				*5월은 1/3값 적용
	구분				4월	5월										비고
	월별 달력일수				30	10
	법정공휴일수				4	2
	기후여건	혹서기 : 33°C 이상			-	0.1
	비작업 일수	동절기 : 일최고기온 0°C 이하 및 신적설 5m 이상			-	-
	(대구지역)	일강수량 : 5㎜ 이상			4.5	1.7
	10년간 평균기상	소계			4.5	1.8
	A :	해당 월에 기후여건으로 인해 계획된 공종의 작업이 불가능한 일수
	B :	해당 월에 포함된 법정 공휴일수
	C :	월별 중복일수(C)=A*B/달력일수(소수점 첫째자리에서 반올림)
	D :	월 비작업일수 = A + B - C
	E :	월 작업일수 = 월별 달력일수 - D
	3) 비작업일수 및 작업일수 산정값
	구분				4월	5월									계	비고
	A	기후여건에 의한 작업 불가능한 일수			4.5	1.8									6.3
	B	월별 법정 공휴일 수			4.0	2.3									6.3
	C	월별 중복일수			0.6	0.4									1.0
	D	비작업일수			7.9	3.7									11.6
	E	작업일수			21.1	5.6									26.7
	4) 정리기간	: 준공검사 준비를 위한 행정절차 및 청소 등 현장정리에 필요한 기간
	5) 2024년 생활환경숲 조성사업 공사기간 산출내역
		가. 비작업일수			12
		나. 작업일수			27
		다. 공사준비기간			1
		라. 공사정리기간			1
		마. 공사기간 (가~라. 합계)			40
		바. 공사개월수 (30일/1개월)			1.3