2021년 제2차 취약계층 에너지복지사업

-설계설명서 및 전기 일반 시방서-

2021.  09.

목   차

설 계 설 명 서

일 반 시 방 서

1. 설 계 설 명 서

1. 건    명 : 2021년 제2차 취약계층 에너지복지사업

2. 위    치 : 엠페러등 19개소 저소득 취약계층 71세대

3. 설    명 : 저소득 취약계층 세대의 노후화 된 조명기구를 고효율 LED조명등으로 교체하여 쾌적한 시설환경 조성 및 에너지 절약을 통한 전력효율향상이 이 사업의 목적으로, 이를 고려하여 기타 용역수행에 필요한 기술적인 제반사항들을 규정하여 생할에 편리함을 더한 최적의 설계가 되도록 한다.

4. 공사개요 : 저소득 취약계층 LED 조명 교체공사 1식

5. 공사기간 : 착공일로부터 60일

6. 예정공정표

기간 공종	예 정 공 정 (일별)				비 고
	15일	30일	45일	60일
도면 검토, 자재 준비
전기 배관
배선 결선
검사 및 준공

7. 설계변경조건

가. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우

나. 새로운 기술, 공법 사용으로 공사비의 절감, 시공 기간의 단축 등 효과가 현저할 경우

다. 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우

- 물량 증감, 사업계획 변경, 관련법규 개정 또는 인허가 사항 변경, 기타 민원 발생 등

8. 기타 사항 : 본 설계 내역외 기타 경미한 사항은 도급자 부담으로 시공한다.

2021년 제2차 취약계층 에너지복지사업

-전기 일반 시방서-

2021.  09.

제 1 장  일반 공통 사항

1. 목  적

본 시방서는 “2021년 제2차 취약계층 에너지복지사업“ 전반에 관한 일반적인 공통사항으로 시공 상 지켜야 할 기술적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

2.1 도면 및 특기사항에 명시된 사항은 본 시방서에 우선하여 적용한다.

2.2 본 시방서는 공사 전반에 적용되는 내용이므로 부분적인 공사인 경우에는 해당 조항만을 적용한다.

2.3 본 공사는 다음에 열거한 법령에 위배됨이 없이 시공하여야 한다.

가. 전기사업법

나. 전기공사업법

다. 전기설비기술기준

라. 내선규정

마. 소방법 및 그 부속법률

바. 한국 산업규격(K,S)

사. 전기용품 안전 관리법

아. 기타 관계법규

2.4 본 공사에 대한 설계도서가 열거한 관계법령과 상이한 부분이 있을 경우에는 관계법령에 따라 시공 하여야 하며, 공사기간 중 관계법령이 개정될 경우 개정되는 법령에 따라 설계 변경 하여야 한다.

3. 공사의 시행

3.1 본 공사 시공자는 공사의 착공 전 공정표 및 시공계획서, 자재반입계획서, 현장 조직표, 출력계획서 등을 제출하여야 하며 매일 공사내용과 예정공정, 출력인원 등을 감독원에게 보고하고 그 지시에 따르며, 일일작업 일지를 작성하여 준공 시 제출 한다.

3.2 수급자는 공사 중 감독원이 공사의 부실 또는 부정이라 인정할 시 감독원의 지시에 따라 즉시 재시공 또는 보수하여야 한다.

3.3 수급자는 본 설계도서 중 예산 내약서상의 수량 및 단가가 정부가 정한 기준보다 과다히 책정되어 발주처로부터 과다 계산된 부분에 대한 잔여처리 감액 또는 환불요구가 있을 시는 계약기간 중은 물론 준공 후에라도 이의 없이 수락하여야 하며, 상기의 감액 또는 환불 액은 발주처가 정한 소정 기일 내에 현금으로 납부하여야 한다.

3.4 시공자는 공사현장에 전기공사업법에 의한 책임기술자를 선임하여 업무와 보안의 책임을 담당하게 한다.

3.5 시공 상 또는 제작에 필요한 도면은 공사 전에 시공도 및 제작도(부품의 견본포함)를 작성하여 감독원의 승인을 받아 시공 또는 제작하여야 한다.

3.6 도면에 표기된 것은 본 공사에 대한 일반적인 범위정도를 표현한 것이므로 수급자는 시공 전에(구조포함), 기계설비 및 기타 관계도면 등을 충분히 검토하여 조명기구, 각종 아웃렛트 및 각종 전기기기 등이 기타 시설물에 대한 간섭을 최대한 줄이면서 그 성능을 발휘 할 수 있도록 시공 설치하여야 한다.

3.7 특기가 있거나 감독원이 필요하다고 인정하는 경우 및 시공 후 매몰되거나 은폐되어 검사가 불가능하거나 곤란한 부분은 감독원의 검사를 받아야 하며, 칼라로 사진촬영(크기12cm * 9cm)을 하여야 한다.

3.8 현장의 안전관리는 관계법규에 의하여 아래 사항을 포함한다.

가. 시공자는 착공일로부터 준공검사 완료일(필요시 인수인계 완료일)까지 현장에 보관된 각종자재(사급 및 관급 일체)와 현장 설치 시공물에 대하여 망실, 파손, 훼손 등 불미한 사항이 없도록 주, 야간 당직자를 배치하여 관리하여야 하며 불미한 사항 발생 시는 도급자가 전적으로 책임을 진다.

나. 상기사항에 있어 분야별 하도급을 계약하여 시공하게 하는 경우에는 원도급자가 하도급 업체에 당직자 배치를 위임할 수 있다.

다. 화재, 소음방지, 위험물 및 그 위치표시, 기타 사고방지에 대한 단속

라. 시공자재 및 시공설비의 정리와 관리, 현장내외의 청소 및 주변 도로의 정비

마. 기타 감독원의 지시사항

3.9 본 공사를 위한 현장사무소 및 창고 등 필요한 가설물을 설치 할 시는 감독원의 승인을 받아야 한다.

3.10 본 공사를 위한 전기 및 통신요금은 준공 시까지 시공자가 부담한다.

3.11 본 공사의 전기수전, 소방검사 등 모든 전기설비의 기능시험을 완료하여 인허가 수속이 완료된 시점을 준공으로 본다. 단, 전기공급자, 시공자 이외의 귀책사유로 인한 경우는 예외로 한다.

3.12 수급자는 준공 시 공사 시공사진, 제시험성적서, 제측정표(절연저항, 접지저항) 사용전검사필증, 준공도면 (원도 및 청사진 5부)및 유지보수에 관한 지도 안내서를 제출하여야 한다.

3.13 준공도면(수급자작성)

가. 준공도의 원도는 양질의 트레이싱지를 사용하여 도면작성을 하여야 한다.

나. 제작승인도는 준공도를 대체할 수 있다.

3.14 수급자는 면허, 특허권, 등록된의장권, 저작권, 상표, 상호 또는 기타 공업소유권 및 지적소유권의 침해로 인한 모든 클래임과 소송으로부터 발주처를 전적으로 면책하고 이를 계약자의 부담으로 보상하여야 한다.

3.15 건강보험료 및 국민연금은 사후 정산 하여야 한다.

4. 사용 자재 및 기기

4.1 본 공사에 사용하는 모든 자재는 도면 및 시방서에 명기된 것을 사용하되 모두 KS규격 품 및 고효율에너지 인증제품을 우선적으로 사용하여야 하며 부득이한 경우, 감독원의 승인을 받아 변경하되 안전인증제품 또는 시중 최고품을 우선 사용하여야 한다.

4.2 본 공사에 사용하고자 하는 모든 자재의 반입 반출은 감독원의 승인을 득한 후 시행하며 반입된 자재의 변질, 손상 또는 기능상 하자가 있는 불량품으로 인정될 때는 이를 사용하지 않는다.

4.3 발주처에서 지급한 자재는 감독원의 승인을 득한 후 사용하여야 하며 수급자는 지급된 자재에 대하여 보관 책임을 지며, 보관 중 파손이나 유실된 자재는 즉시 보상하여야 한다.

4.4 지급된 자재 중 잔재가 발생하였을 시는 현장 감독원에게 보고하고 감독관의 지시에 따라 반납 또는 보관 전환조치를 하여야 한다.

5. 관계관서의 수속

수급자는 공사 착공과 동시에 공사에 필요한 관계관서(한전, 한국전기안전공사) 허가 신고 및 검사 등을 시공자가 시공자의 비용으로 발주처를 대행하여 신속하게 이를 행하여야 하며 각 시험 및 검사에 합격하여 공사 준공과 동시에 즉시 사용할 수 있게 하여야 한다. 다만, 관계관서에 납부하는 공과금은 발주처가 이를 부담한다.

6. 시설물의 훼손

공사 중 시설물을 파괴 또는 손상시켰을 시는 즉시 현장감독원의 지시에 따라 복구 또는 재시공 하여야 하며, 이에 소요되는 경비는 시공자 부담으로 한다.

7. 설계변경

현장사정 상 설계 변경하고자 할 경우 시공자 또는 감리자는 다음과 같은 서류를 구비하여 감독원의 승인을 득하여야 한다.

7.1 설계변경 사유서

가. 관계법규에 개정으로 인한 공사내용 변경에 따는 설계변경

나. 전력, 통신, 소방관서등 관련공사의 계획변경에 따른 설계변경

다. 발주처 요구에 의한 설계변경

라. 공종별, 계통별, 표기오류, 누락으로 당연히 정정하여야 할 내용

7.2 설계변경 도면

7.3 공사비 증감내역

8. 기기 및 자재의 시험

8.1 본 공사에 사용하는 모든 자재 중 관계기관의 시험을 필하여야 할 자재는 그 시험 성적서를 감독원에게 제출한다.

8.2 사용자재 중 감독원이 시험의 필요를 요구할 시에는 시공자는 이에 응하여야 한다.

8.3 본 시방서 또는 공사시방서에 시험명시가 없는 품목이라 할지라도 외관상 자재가 조잡하여 품질의 적정여부를 판별키 어려울 시는 현장 감독원은 기기자재의 시험을 명 할 수 있다.

8.4 제작자 자체시험으로 명기된 품목에 대하여 자체시험 시설이 미흡 또는 미비하다고 인정될 시는 감독원은 공인 기관에 시험을 명 할 수 있다.

8.5 시험 성적표에는 소요지구를 명시하여야 한다.

8.6 본 시험에 소요되는 제비용은 수급자부담으로 한다.

9. 공사보증

9.1 공사 준공 인도 후 2년간 시공범위내의 모든 하자발생은 지체 없이 이를 시정하여야 한다. (단 소모성의 것은 제외한다.)

제 2 장  조명설비 공사

1. 자재

1.1. LED조명기구는 국내자재를 사용하며, 고효율에너지기자재 인증받은 것으로 한다.

1.2 제작도면 및 시방서에 명기된 것으로 사용하고, 모두 KS 규격제품을 사용한다. KS규격에 제정되어 있지 않는 자재는 이에 적합한 것을 사용한다. 단, 규격품이 없을 시에 시중의 최상품 혹은 동등 이상의 자재만을 사용한다.

1.3 사양서를 제출하여 승인을 득한 것을 반드시 사용해야 하며, 감독관의 요청으로 자재 검수 및 시험은 자체 시험 성적서 혹은 이에 상응하는 자료로 대처할 수 있다.

2. 기구

2.1 LED 조명기구 전체는 용융되기 쉬운 물질, 변형되기 쉬운 물질 및 변색되기 쉬운물질을 사용하여 제작하지 않도록 한다. 특히, 이들 물질은 등기구의 발열체로부터 접 열이 전도되는 개소나 LED등이 접속되거나 폭발 시 비화할 수 있는 소에는 사용할 수 없으며, 등기구의 장식 상 필요한 외피(등기구 커버)로서 탈락의 위험이 없이 안정한 개소에 한하여 사용할 수 있다.

2.2 LED 조명기구 조립은 용접 또는 납땜을 사용할 수 없다. 나사를 이용 할 때에는 사용 中 이완되는 일이 없도록 완전하게 결속해야 하며, 필요 개소에는 너트 또는 복귀방지 장치를 하여야 한다.

2.3 천장 매입형 LED 조명기구는 가요전선과 커넥터를 전원 인입구에 직접 접속할 수 있는 구조로 제작하여야 한다.

2.4 LED 조명기구는 양질의 재질로 구성되고 충분한 내구성을 가져야 하며 견고하게 부착될 수 있어야 한다.

2.5 평상시 사용상 해로운 결점이 없어야 한다. (눈부심/LED점등불량 등등)

2.6 LED 조명기구를 고정 및 설치 시 진동 혹은 여진 등으로 탈락되지 않도록 안전 고리 부착 및 체인을 이용하여 LED 조명기구를 고정/설치하여야 한다.

2.7 광원위치 조정장치가 있는 경우에는 광원의 이동이 원활하고 동등의 영향을 받지 않도록 사용하여야 한다.

3. 내부배선

3.1 등기구내에서 전선의 접속개소는 최소화하여야 하며, 점검이 가능한 위치에서 단자대를 사용하여 접속해야 한다. 내부열에 의하여 벗겨지거나 변형되지 아니하고 특성 저하가 없는 것으로써 사용 전선과 동등 이상의 내열성이 있는 튜브 절연체를 끼워 절연하도록 한다.

3.2 전선은 발열부에 접촉할 우려가 없도록 하고 점등 시 외부에서 배선이 직접 보이거나 그림자가 보여서는 안 된다.

3.3 인출선은 외부로부터 장력이 가해질 경우, 내부 접속부에 영향을 받지 않는 구조이어야 하며 보호피복을 사용하여야 한다.